2-5. 망미2동 우리은행 일원 자연재해위험개선지구 사업 조속 추진

건설과     하수계 / 전강진 ☎ 610-4944

안전관리과 예방복구계 / 이민수 ☎ 610-4652

최근 빈번하게 발생하고 있는 돌발성 집중호우로 인한 우리은행 일원 침수피해 해소로 주민 생명과 재산권 보호를 위하는데 그 목적이 있음

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2023~2027년

❍ 사업위치 : 수영구 망미동 212-9번지 일원

❍ 사업규모 : 배수펌프장 V=4,000㎥, 수중펌프 Q=320㎥/min 등

❍ 사업내용 : 침수피해 저감을 위한 망미2 자연재해위험개선지구 정비사업 추진

❍ 총사업비 : 38,500백만원(국비 19,250, 시비 9,625, 구비 9,625)

□ 공약사업 추진사항

❍ 사업이행여부

추 진 여 부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2024.12.31.현재
		○		20%

❍ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
38,500	19,250	9,625	9,625	-	3,948	2,324	462	1,162	-

연도별 사업비 집행액
계	2022	2023	2024	2025	2026
1,105	-	1,000	105	-	-

□ 세부추진내용

❍ 2022년

▷ ‘22. 2.     : 망미2지구 자연재해위험개선지구 지정 고시

▷ ‘22. 3.     : 국고보조금(’23. 재해위험지역 정비사업) 신청

▷ ‘22. 9.     : 사업 확정(행안부) 및 보조금 예산안 통보(가내시)

▷ ‘22.11.~12. : 기술용역 발주 계획 심의

▷ ‘22.12.     : 용역 계약심사 요청

❍ 2023년

▷ ’23. 1.~ 2. : 사업수행능력평가서 제출 공고 및 평가

▷ ’23. 2.~ 3. : 가격입찰 및 적격심사

▷ ‘23. 3.     : 설계용역 착수

▷ ’23. 8.     : 행정안전부 사전협의

▷ ‘23. 9.     : 방지대책(안) 수립

▷ ’23.11.     : 관로조사 등

❍ 2024년

▷ ’24. 1.~ 3. : 공법선정 및 기본계획 보고서 작성

▷ ’24. 4.     : 행안부 기본설계 사전설계검토 사전협의(1차)

▷ ’24. 5.     : 행안부 기본설계 사전설계검토 사전협의(2차)

▷ ‘24. 8.     : 행안부 기본설계 사전설계검토 심의

▷ ’24.12.     : 행안부 기본설계 사전설계검토 재심의(☞조건부 채택)

□ 문제점 및 개선방안

❍ 문제점(미흡한점)

▷ 행안부 실시설계 사전설계검토심의, 市 설계VE 등에서 기존 통과된        사업의 내용과 크게 변동되는 심의의견이 제시되는 등 다양한        의견에 대한 검토 등으로 사업 추진에 지장을 초래할 우려가 있음

❍ 개선방향

▷ 심도있는 검토와 다양한 대안에 대한 효율적이고 체계적으로 사업

관리하여 지연 방지

□ 향후추진계획

❍ ’25. 1.     : 지하안전평가 용역 착수 및 공법·자재 외부전문가 자문회의

❍ ’25. 3.~ 5. : 市 설계의 경제성(VE) 검토

❍ ’25. 4.~ 6. : 행정안전부 사전설계검토(실시설계) 심의 신청

❍ ’25. 6.     : 공사원가 사전검토(조달청)

❍ ’25. 8.     : 건설사업관리(설계) 및 설계 용역 준공

❍ ’25. 9.     : 공사 착공, 건설사업관리(시공) 용역 착수

❍ ’27.10.     : 사업 준공