3-6. 망미동(병무청 맞은편) 도시재생사업 추진

스마트도시과 도시재생기획계 / 장은영 ☎ 610-4922

국토교통부 도시재생사업 공모를 통해 부산 유일 특화재생형 도시재생 공모사업에 선정되어 주거환경 개선 등 지역 경쟁력 확보

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2021~2026년

❍ 사업위치 : 망미동 804-1번지(망미종합시장) 일원

❍ 사업규모 : 면적 101,000㎡

❍ 사업내용 : 도시재생활성화계획 수립 및 도시재생사업추진

❍ 협조부서(기관) : 평생교육과, 일자리경제과, 문화관광과 등

❍ 총사업비 : 25,242백만원(국 12,000, 시 6,000, 구 7,242)

□ 공약사업 추진사항

❍ 사업이행여부

추 진 여 부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2024.12.31.현재
		○		65%

❍ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
25,242	12,000	6,000	7,242		25,242	12,000	6,000	7,242

연도별 사업비 집행액
계	2021~2022	2023	2024	2025	2026
6,287	3,877	1,112	1,298	-	-

□ 세부추진내용

❍ 2022년

▷ 주민공청회 개최, 구의회 의견청취

▷ 망미동 도시재생활성화 계획안 수립

▷ 도시재생 공모사업 신청(서면평가, 현장평가, 발표평가, 적격심사)

▷ 국토교통부 도시재생공모사업 선정

❍ 2023년

▷ 망미동도시재생사업 고시

▷ 망미동도시재생주민협의체 구성 및 발대식 개최

▷ 망미특화가로조성사업, 안심길조성사업 기본 및 실시설계 용역 착수

▷ 망미 에코정원 조성사업 공사 계약 체결

▷ 집수리지원사업(1차) 공사 착공

▷ 망미 문화쉐어센터조성사업 설계 공모 공고

❍ 2024년

▷ 망미 집수리지원사업 공사 1차(32호) 준공, 2차(27호) 준공

▷ 골목길 동행사업 실시설계 완료

▷ 망미 문화쉐어센터 실시설계 완료

▷ 망미 청소년탐구센터 실시설계 용역 착수

▷ 망미 종합시장 주민교류공간 조성 설계 완료 및 공사계약 체결

□ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

❍ ’25. 1.~’25.12. : 망미동 도시재생활성화계획 중대 변경 용역

❍ ’24.12.~’25. 5. : 망미 크리에이터센터 조성공사·준공

❍ ’25. 2.~’25.12. : 망미 문화쉐어센터 조성공사·준공

❍ ’25. 2.~’25. 6. : 망미 종합시장 주민교류공간 조성공사·준공

❍ ’25. 3.        : 망미 에코정원 조성공사·준공

❍ ’25. 4.~’26. 2. : 망미 청소년탐구센터 조성공사·준공