6-2. 망미국민체육센터 건립

행정지원과 생활체육계 / 방은진 ☎ 610-4792

건립 부지 매입을 완료하고, 관련법령에 따른 사전절차 이행 및 기본·실시설계 용역 계약 등 계획된 일정에 따라 정상 추진 중

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2027년

❍ 사업위치 : 수영구 망미동 774-276

❍ 사업규모 : 대지 2,374㎡, 연면적 6,904㎡, 지하3층/지상3층

❍ 사업내용 : 생활밀착형(일반형) 국민체육센터 건립

❍ 협조부서 : 건축과, 안전관리과

❍ 총사업비 : 43,136백만원(국비 3,000, 시비 3,000, 구비 37,136)

❍ 시설계획(안)

층별	면적(㎡)	주요용도
계	6,904(2,092평)
지하3층	744(225평)	기계실, 전기실
지하2층	1,678(509평)	주차장, 방재센터
지하1층	1,459(442평)	수영장, 샤워실, 탈의실
1층	1,244(377평)	다목적실, 헬스장, 물품보관소
2층	780(236평)	다목적실, 탈의실
3층	999(303평)	다목적 실내체육관

□ 공약사업 추진사항

❍ 사업이행여부

추 진 여 부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2024.12.31.현재
		○		30%

❍ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
43,136	3,000	3,000	37,136		5,736	200		5,536

연도별 사업비 집행액
계	2022	2023	2024	2025	2026
4,937	3,936	-	1,001

□ 세부추진내용

❍ 2022년

▷ ‘22.12. : 건립부지 매입 완료

❍ 2023년

▷ ‘23. 1. : (가칭)망미국민체육센터 건립 기본계획 수립

▷ ‘23. 2. : 구 자체 지방재정영향평가 심의

▷ ‘23. 3. : 부산시 신규투자사업 사전심사 완료

▷ ‘23. 4. : 부산시 지방재정영향평가 심의 완료

▷ ‘23. 7. : 체육센터 건립 부지 도시관리계획(시설:체육시설) 결정(신설)

공공건축 사업계획 사전검토 완료

▷ ‘23. 9. : 문체부 2024년 생활체육시설 확충 지원사업 공모 선정

❍ 2024년

▷ ’24. 3. : 행안부 2024년 제1차 정기 지방재정투자심사 조건부 승인

▷ ‘24. 6. : 설계공모지침서(안) 작성 완료

▷ ’24. 7. : 공공건축 심의 완료(부산시 디자인도시정책담당관)

▷ ‘24. 9. : 설계공모 추진

▷ ’24.12. : 설계공모 당선작 선정, 기본 및 실시설계 용역 계약

□ 문제점 및 개선방안

❍ 해당없음

□ 향후추진계획

❍ ‘25. 1. : 기본 및 실시설계 용역

❍ ‘26. 1. : 공사 착공

❍ ‘27.12. : 공사 준공