6-6. 노후 동 행정복지센터 재건립

행정지원과 자치행정계 / 송영두 ☎ 610-4112

40년 이상 경과한 노후 동사를 주민들의 의견을 반영하여 다양한 행정수요에 대처할 수 있도록 건립하고자 연차별 추진계획에 따라 적합하게 수행

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2022~2026년

❍ 사업위치 : 남천1동·수영동 행정복지센터

❍ 사업내용 : 노후 동 행정복지센터 재건립

❍ 총사업비 : 11,145백만원(구비 10,445, 특별교부세 700)

□ 공약사업 추진사항

❍ 사업이행여부

추 진 여 부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2024.12.31.현재
		○		20%

❍ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
11,145			10,445	700	948			248	700

연도별 사업비 집행액
계	2022	2023	2024	2025	2026
9			9

□ 세부추진내용

❍ 2022년

▷ ‘22. 1. : 수영동사 재건립 기본계획 수립

▷ ‘22.12. : 수영동사 건축기획용역비 편성(2023년 본예산)

❍ 2023년

▷「수영동 행정복지센터 재건립 건축기획설계 용역」

- 용역시행 : ’23. 5. 9.(화)~‘24. 6.24.(월)

▷ 공공건축사업계획 사전검토 완료(부산시공공건축지원센터) : ’23. 9월

▷ 2030년 부산도시관리계획 재정비 건의 : 수영동 신축 부지 고도제한 완화

❍ 2024년

▷ ’24. 5. : 공공건축심의위원회 심의 완료(원안가결)

▷ ‘24. 6. : 건축기획설계 용역 준공

▷ ’24.12.~2025. 3. : 설계 공모 및 선정

□ 문제점 및 개선방안

❍ 문제점(미흡한점)

▷ 남천동 일대 공시지가 급등 및 유휴지 부족 등으로 남천1동 행정        복지센터 재건립에 적합한 부지 확보 어려움

❍ 개선방안

▷ 남천1동 신규 행정복지센터 부지 확보를 위해 주민 및 인근 부동산        적극 활용, 부지 확보 노력

□ 향후추진계획

❍ 2025년

▷ 공공건축설계 공모작 선정

- ‘24년 공모 사업비 및 기본실시설계 사업비 편성

▷ 수영동 행정복지센터 재건립 설계 공모 및 기본실시설계 시행

▷ ’25년 수영동 행정복지센터 임시동사 이전 추진

▷ 수영동 행정복지센터 기존 건물 철거공사

▷ 수영동 행정복지센터 재건립 공사 착공

❍ 2026년

▷ 수영동 행정복지센터 재건립 공사 실시

▷ 남천1동 신축 동사 부지 확보 및 부지매입비 예산 편성