9

주요 투자사업 추진현황

9-1. 투자심사 대상사업

우리 수영구에서 ‘15년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2016년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
수영구 국민체육센터 건립	20,232		3,040	17,192	2018년	2015년	-
한바다중학교 다목적체육관 건립	3,386			3,386	2017년	2015년	-
망미초등학교 다목적강당 건립	3,222			3,222	2017년	2015년	-
청소년 문화의 집등 건립	2,595			2,595	2018년	2015년	-
전통시장 주차장환경 개선사업	2,920		2,508.7		2015	2015	100%

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2015년에 추진한 사업

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

수영구 국민체육센터 건립

담당자

총무과 송용수 (☎610-4792)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민들이 쉽게 이용할 수 있는 체육 공간 조성으로 구민 복지 수요

증대는 물론 체육활동 외 다양한 문화활동이 가능한 생활 체육공간 확대       로 지역특성에 맞는 선택적 수요 활동 공간 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 4 ~ 2018. 1.

○ 위 치 : 수영구 수영로 521번길 55 (舊 공무원교육원 부지)

○ 규 모 : 연면적 5,000㎡(지하2층/지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,232백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	20,232		3,040	8,446	8,746
국 비	3,200		200	1,500	1,500
시 도 비	5,000			3,000	2,000
시군구비	12,032		2,840	3,946	5,246
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 설계)

❍ 2015.  4월 : 수영구 국민체육센터건립 지원대상 선정

❍ 2015.  7월 : 공유재산관리계획 승인, 지방재정투자심사 승인

❍ 2015. 12월 : 공공건축사업계획 사전검토 의견 반영

❍ 2016.  3월 : 계약심사 완료 및 설계공모 공고

❍ 2016.  5월 : 계약체결 및 설계용역착수

□ 향후계획

〇 2016. 12월 : 공사착공 및 감리용역 착수

〇 2017. 10월 : 공사 완공

〇 2018.  1월 : 국민체육센터 개관

□ 사업변경 내역(해당시)

(단위 : 백만원)

구 분	당 초	현 재
사업규모	4,070㎡	5,000㎡
총사업비	15,910	20,232

사업명

한바다중학교 다목적체육관 건립

담당자

총무과 송용수 (☎610-4792)

□ 사업목적 및 필요성

다목적체육관 증축으로 부족한 교육시설을 해소하고 다양한 교육과정을

수용할 수 있는 교육시설을 확보하여 학생 및 지역주민을 위한 문화체육      공간으로 활용하고자 함

□ 사업개요

○ 기   간 : 2016.1. ~ 2017. 5.

○ 위   치 : 부산광역시 수영구 광안로21번가길 57

○ 규   모 : 지상3층, 건축면적 1,018.49㎡, 연면적 2,087.56㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,386 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	3,386			1,693	1,693
국 비	900			450	450
시 도 비
시군구비	681			340	341
지 방 채
민간자본
기 타	1,805			903	902

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : )

○ 2016. 1. : 설계용역 발주

○ 2016. 3. : 설계용역 착공

○ 2016. 7. : 설계용역 완료

○ 2016. 7. : 일상감사 의뢰중

□ 향후계획

○ 2016. 7. : 공사 발주

○ 2016. 8. : 공사 착공

○ 2017. 5. : 공사 완료

사업명

망미초등학교 다목적강당 건립

담당자

총무과 한혜영 (☎610-4129)

□ 사업목적 및 필요성

○ 망미초등학교는 개교 40년이 경과한 학교로 다목적강당이 없어 다양한

교육과정 운영 및 학교 행사 진행이 어려운 실정임.

○ 다목적강당의 건립으로 학생들의 체력증진과 인성발달에 기여하고 지역

주민들의 평생학습 공간, 문화센터로서의 역할 수행 기대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 11월 ~ 2017년 7월

○ 위 치 : 부산광역시 수영구 수미로 35번길 27

○ 규 모

▷ 2층 규모의 다목적강당 건립 (1층 필로티, 2층 다목적강당)

▷ 1층 필로티 공간은 주차장으로 이용, 2층 다목적강당 720㎡ 면적

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,222백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	3,222			85	3,137
국 비	2,343			-	2,343
시 도 비	238			85	153
시군구비	102			-	102
시교육청	539			-	539

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

❍ 2015.  4월	해운대교육지원청⇒부산시로 다목적강당 건립 지원 요청,

구비 분담 확정

❍ 2015.  7월	2015년도 학교 다목적강당 건립지원사업 선정 통보(부산시)

❍ 2015.  9월	예산부족으로 교육부 특별교부금 교부 지연

❍ 2015.10. 7.	수영구 교육경비보조금심의위원회 심의 확정

❍ 2015.11.13.	區 교육경비보조금(102,000천원) 지급

❍ 2016. 1. 8.	2016년 제1차 특별교부금 교부 확정(2,343백만원)

❍ 2016.  4월	특별교부금 부족예산(539백만원) 추경예산 편성 약속(市 교육청)

❍ 2016.  4월    설계 용역 발주, 기본평면도 설계

□ 향후계획

❍ 2016. 8월  :   실시 설계

❍ 2016.11월  :   공사 착공

❍ 2017. 7월  :   공사 준공

□ 사업변경 내역

❍ 총사업비

당초	현재	변경사유
3,399백만원 (국비3,059, 시비238, 구비102)	3,222백만원 (국비2,343, 시교육청 539, 시비 238, 구비 102)	· 교육부 특별교부금 삭감 ☞시교육청 예산 추가지원 (539백만원) · 당초 사업비의 95%수준으로 사업비 재확정

❍ 사업기간

당초	현재	변경사유
2015.11 ~ 2017.2	2015.11~2017.7	· 교육부 특별교부금 확보 지연, 삭감 및 추가재원 마련

사업명

청소년 문화의 집 등 건립

담당자

복지서비스과 이철용 (☎610-4612)

□ 사업목적 및 필요성

○ 일상속에서 자유롭게 이용할 수 있는 생활밀착시설로 청소년의 건전한

여가활동 보장을 위한 수련 및 문화•복지시설 조성

○ 진로교육지원센터, 청소년상담복지센터, 학교 밖 청소년지원센터와 함께

복합시설로 설치하여 생활밀착형 청소년 문화•복지 공간 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 수영구 수영로521번길 22(광안동 1268-2) 일원

○ 대지면적 : 700 ㎡

○ 연 면 적 : 995 ㎡(지하 1층/ 지상 3층)

○ 사 업 비 : 2,595백만원

○ 시설 배치(안)

구분	주요시설	계획면적	비고
지하 1층	엘리베이트·계단·홀(50㎡)	50㎡
지상 1층	사무실, 방과후 아카데미, 북카페, 상담실, 회의실 등	315㎡	청소년 문화의 집, 진로교육 지원센터
지상 2층	프로그램실, 동아리실, 직업체험실, 다목적실	315㎡
지상 3층	사무실, 교육실, 집단상담실, 개인상담실, 사업실	315㎡	청소년 상담복지센터, 학교 밖 청소년지원센터
계	995.0㎡(300.9평)	995.0㎡(300.9평)

※ 청소년 문화의 집 물품(비품) 구입비 50백만원

※ 매년 운영비(진로교육지원센터 포함) 230백만원 별도 확보

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,595백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	2,595				2,595
국 비	1,056				1,056
시 도 비	72				72
시군구비	1,467				1,467
지 방 채
민간자본
기 타

사업명	청소년 문화의 집 등 건립	담당자	복지서비스과 이철용 (☎610-4612)
□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%) ○ 2015. 2월 ~ 12월 : 기본계획 수립, 투자사업 심사 완료, 공유재산 취득 심의 완료 부지확보, 예산확보(지특500백만원,시비34백만원,구비34백만원) ○ 2016. 1월 ~ 7월 : 세부계획 수립, 수요조사 실시(315명 대상) 1차 건립심의위원회 개최, 설계공모 및 업체선정 □ 향후계획 ○ 2016. 7월 : 2차 건립심의위원회 개최(기본설계(안)에 따름 심의) ○ 2016. 7월 : 여성가족부 수련시설 자문심의위원회 자문의뢰•통지 ○ 2016. 9월 : 실시설계 용역에 따른 보고회, 제3차 건립심의위원회 개최 ○ 2016. 10월 : 설계용역 성과품 납품 따른 구 및 시 계약심사 ○ 2016. 12월 : 공사•감리 계약의뢰, 공사착공 및 운영준비 (조례제정, 위탁업체 공모•선정, 인력채용) ○ 2017. 11월 : 공사준공, 운영물품(책상, 비품 등) 구입 ○ 2018. 1월 : 개관 및 운영개시(국민체육센터 준공시기에 따라 개관•운영시기 조율) ※ 3층 청소년복지지원시설 구비 사업비 특별교부세 확보 추진(예산계 협의) ※ 특별교부세 확보가 어려울 경우 기본설계 완료시 증액 예산 2017년도 구비 확보 조치 □ 사업변경 내역(당초 2,030백만원 → 변경 2,595백만원(27.8%증액)) ○ 주차장 면수 확대(5면 → 10면), 구거 이전비 일부 ○ 사업비(설계용역비 및 감리비 포함) 증가 : 구비 565백만원 증액 ▷ 청소년 문화의 집(1,2층) : 1,200백만원(지특 1,056, 시비 72, 구비 72) ▷ 복합시설이 가능한 청소년 문화의 집 특성을 감안하여, 3층 청소년 복지 지원시설(청소년상담복지센터, 학교 밖 청소년 지원센터) 구비 확보 방안으로 추가 예산 확보(3층 증축, 부대시설 등 1,395백만원)

사업명

전통시장 주차장환경 개선사업

담당자

지역경제과 윤영희 (☏610-4475)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통시장의 열악한 주차난 해소를 위해 전통시장 주변 공영주차장 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1 ∼ 2015. 12

○ 위 치 : 민락동 181-206, 181-41

○ 규 모 : 공영주차장 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,508.7백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	2,508.7			2,508.7
국 비	1,489.8			1,489.8
시 도 비	744.9			744.9
시군구비	274			274
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :100%)

○ 공영주차장 2개소 조성 - 부지매입

□ 향후계획

○ 중소기업청 사업고시에 따라 추가 대상지 발굴·추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 민락동 181-41번지 주차장 매입부지 변경에 따라 사업비(국,시비) 감액

- 국비 : 당초 1,764  변경 1,609.8백만원

- 시비 : 당초 872   변경 794백만원

9-2. 지방채 발행사업

수영구 해당사항 없습니다.

9-3. 민간투자사업

수영구 해당사항 없습니다.