109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 수영구에서 ‘17년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

사업명	총사업비	2016년까지 집행사업비	2017년 소요사업비	2018년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투 자 심사연도	현재까지진척률
망미초등학교 다목적강당 건립지원사업	2,929	217	2,712		2017	2015	100%
가족행복센터 건립사업	2,461	-	2,461		2017	2017	100%
응답하라 수영팔도 이야기(좌수영성 일원 재창조 사업)	5,926	1,548	1,733	2,237	2018	2014	60%
청소년 문화의 집 등 건립	2,595	42	707	1,846	2019	2015	15%
수영구 국민체육센터 건립	21,442	1,002	3,888	13,852	2018	2015	12%
한바다중학교 다목적 학교 체육관 건립지원사업	3,566	668	1,239	1,659	2018	2015	52%
수영구 평생학습관 건립	2,851		732	2,119	2018	2016	15%
수영구 장애인복지관 건립	6,420		202	5,425	2018	2016	25%
수영구 육아종합지원 센터 건립	4,993	750	863	3,380	2018	2016	25%
광안리 어방축제		488	533	533	매년	2016
동수영중학교 다목적 강당 건립 지원사업	2,767			2,767	2018	2016	25%
수영구 공공도서관 재건축 사업	19,712			14,909	2020	2017	0%
광안도서관 건립 사업	3,869			3,400	2020	2017	0%
망미2동 생활문화센터 조성	6,666			5,695	2019	2017	5%
수영구 노인복지관 분관 건립	6,723		300	5,637	2018	2017	25%

(단위 : 백만원, %)

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2017년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황(붙임6)

10-2. 지방채 발행사업

수영구 해당사항 없습니다.

10-3. 민간투자사업

수영구 해당사항 없습니다.

사업명

가족행복센터 건립 사업

담당자

복지서비스과 유보향(☎610-4353)

□ 사업목적

○ 건강가정기본법 제35조와 다문화가족지원법 제12조에 의거 자치구·군은       건강가정지원센터와 다문화가족지원센터를 설치·운영토록하고 있으나

우리구는 다문화지원센터등 관련시설 부재로 업무추진에 어려움이 있음.

○ 노인·한부모·다문화·북한이탈주민·1인 가족 등 점차 다양해지고 세분화

되는 가족형태에 맞는 통합적 가족지원서비스와 국가적 책무로서 일자리

창출을 지원하기 위한 「가족행복센터」를 건립하여 건강가정, 다문화,        일자리 등 원스톱 통합서비스체계를 구축코자 함.

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2017년 2월∼ 10월

○ 사업위치 : 수영구 황령산로7번길 45

○ 규    모 : 토지236.84㎡(71.6평), 연면적(지하1층/지상1층)771.17㎡(233.2평)

○ 투자심사 승인액 : 24.61억원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,461백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액
		기투자	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
계	2,461	0	0	0	0	0	2,461
국 비	0
시 비	0
구 비	2,461						2,461
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

□ 추진내역

○ 2017. 2.  2. : 건립 계획 보고

○ 2017. 3.  2. : 수영구 공유재산심의회 심의

○ 2017. 3. 14. : 특별교부세 신청

○ 2017. 3. 15. : 지방재정투자사업 심사

○ 2017. 3. 16. : 특별교부세 12억 교부결정

○ 2017. 3. 24. : 특별교부금 신청

○ 2017. 5. 01. : 건립지 변경 계획 보고

○ 2017. 5. 19. : 수영구 공유재산심의회 변경 심의

○ 2017. 5. 19. : 지방재정투자사업 변경 심사

○ 2017. 6. 16. : 2017년 제1회 추가경정예산 확보

○ 2017. 6. 16. : 수영구의회 공유재산심의 승인

○ 2017. 6. 19. : 특별교부세 변경 신청 사업설명(행자부 방문)

○ 2017. 7. 17. : 특별교부금 변경 신청 사업설명(시 예산팀 방문)

○ 2017. 7. 24. : 특별교부금 10억 교부결정

○ 2017. 7. 31. : 특별교부세 용도변경 승인

○ 2017. 8. 10. : 토지 및 건물 매입계획 보고

○ 2017. 8. 11. : 토지 및 건물 매매계약 체결

○ 2017. 8. 18. : 건강가정 및 창업지원센터 설치 추진계획 보고

○ 2017. 8. 21. : 건강가정 및 창업지원센터 설치 설계용역 계약

○ 2017. 9. 22. : 토지 및 건물 등기완료 보고

○ 2017.10. 11. : 건강가정 및 창업지원센터설치 공사 발주

○ 2017.12. 01. : 건물 준공

○ 2017.12. 06. : 건강가정지원센터 이전

○ 2017.12. 21. : 건강가정 및 창업지원센터 개소

□ 사업변경 내역

○ 사업부지 변경 : 수영로 724(광안동) ⇒ 황령산로7번길 45(남천동)

○ 사업명칭 변경 : 가족행복센터 ▷ 수영구 건강가정 및 창업지원센터 건립

※ 변경사유 : 특별교부세 교부금 사업명칭과 일치

〚붙임6〛 10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

응답하라! 수영팔도 이야기

(좌수영성 일원 재창조 사업)

담당자

창조도시교육추진단

조제성(☎051-610-4891)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수영의 역사적자원(수영사적공원, 좌수영성지)과 우수한 지역자원(수영강,          팔도시장)을 연계하여 지역적 특성이 반영된 장소로 재창조 경제·사회·환경적인        역할을 동시에 수행 할 수 있는 거점공간 조성

○ 지역의 풍부한 문화·예술·역사자원을 산업화하고 관광상품 개발을 통한       지역경제 활성화 유도로 체계적이고 창조적인 거버넌스 모델 구축

○ 수영강～팔도시장～수영사적공원간 연계사업을 통해 단절된 보행공간을 회복하여       주민이 주체가 되는 참여형 장소로 재창조 기틀 마련

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015년 ~ 2017년

○ 사업위치 : 부산광역시 수영구 수영동 수영사적공원, 팔도시장 일원

○ 규    모 : ◽ 좌수영성 이야기길 조성(L=1,420m, B=2~8m)

◽선소거리길 조성(L=147m, B=12m), 수영팔도장터길 조성(L=209m, B=6~8m)

◽수영재창조 아카데미 및 문화관광루트 개발 : 주민⋅상인⋅시민 아카데미

○ 투자심사 승인액 : 56.7억원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,926백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획
		기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,926	0	408	1,548	1,733	2,237
국 비	2,963		250	774	821	1,118
시 비	1,481.5		79	387	456	559.5
구 비	1,481.5		79	387	456	559.5
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 60%)

○ 2015. 5월 ~ 2015. 12월 : 기본계획 및 실시설계 용역완료

○ 2016. 4월 : 좌수영 이야기길 및 동문거리길 공사 발주

○ 2016. 5월 : 공사착공(1차), 의용단길, 동문거리길 조성 완료

○ 2017. 4월 : 공사 발주 및 착공(2차)

○ 2017. 6월 : 공사준공(1차), 관아거리길 및 남문거리길, 중영거리길 조성 완료

○ 2017. 12월 : 공사준공(2차), 수영팔도장터길 및 선소거리길 조성 완료

□ 향후계획

○ 2018. 1월 : 2018년 좌수영성 추진 계획(안) 수립

○ 2018. 2~4월  : 협상의 의한 계약 제안서 평가위원회 개최 및 평가

○ 2018. 5~11월 : 사업 디자인구상 및 제작, 설치

○ 2018. 10~11월 : 전기공사 발주 및 사업완료 예정

□ 사업변경 내역

○ 당초 : 2018년 좌수영성 일원 주민체육시설 건설(사업비 1,232백만원)

변경 : 2018년 좌수영성 일원 빛과 물의 공간 조성(사업비 1,296백만원)

※ 사업비 증64백만원으로 세부사업 금액 증⋅감(20%이하) 경미한 변경

사업명	당초(안)	변경(안)
좌수영성 일원 재창조사업	주민체육시설 건설	빛과 물의 공간 조성 등 경관조명 및 조형물 설치
사업비	1,232백만원	1,296백만원
증⋅감내역	-	증64백만원

사업명

청소년 문화의 집 등 건립

담당자

복지서비스과 이민수(☎610-4612)

□ 사업목적 및 필요성

○ 일상속에서 자유롭게 이용할 수 있는 생활밀착시설로 청소년의 건전한

여가활동 보장을 위한 수련 및 문화 복지시설 조성

□ 사업개요 ☞ 투자심사내역

○ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2017. 12.

○ 사업위치 : 부산시 수영구 광안동 1268-2번지 일원

○ 규    모 : 연면적 1,000㎡, 지상3층

○ 투자심사 승인액 : 20.85억원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,595백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획
		기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,595	0	0	42	707	1,846
국 비	1,056	0	0	42	470	544
시 비	72	0	0	0	11	61
구 비	1,467	0	0	0	226	1,241

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 15%)

❍ ‘17. 1월	설계용역 완료

❍ ‘17. 3월	공사 및 감리계약

❍ ‘17. 4월 공사착공 및 건설사업관리용역 착수

❍ ‘17. 6월 우수관로공사 준공

□ 향후계획

❍ ‘18. 2월	건축공사 현장 토양정화작업

❍ ‘18. 3월	청소년 문화의 집 세부운영계획 수립 및 운영조례 제정 등 개관 준비

❍ ‘18. 6월	위탁단체 공모·선정, 운영위원회 구성, 인력채용 준비

❍ ‘18.10월	공사 준공

❍ ‘18.11월	건설사업관리용역 완료

❍ ‘19. 1월	청소년 문화의 집 개관, 수영구 청소년상담 복지센터 이전

□ 사업변경내역

구 분	당 초	변 경	변경사유
시설규모	○ 지상 3층 - 연면적 : 1,000㎡	○ 지하 1층 ~ 3층 - 연면적 : 995㎡	사업비(설계비 및 감리비 포함) 증가, 주차장 면수 확대, 구거 이전비 일부
사 업 비	2,085백만원 (지특 1,056, 시비 144, 구비 885)	2,595백만원 (지특 1,056, 시비 72, 구비 1,467)
사업기간	2016년 ~ 2017년	2016년 ~ 2019년	오염토가 발견으로 인한 공사 기간 연장

사업명

수영구 국민체육센터 건립

담당자

총무과 차상명(☎610-4932)

□ 사업목적 및 필요성

○ 급증하는 생활체육 수요증가에 따른 공공체육시설의 확충으로 구민체력

증진 및 삶의 질 향상

○ 어린이, 청소년, 노인, 장애인 등 다양한 지역주민의 체육활동 기반 조성

□ 사업개요

○ 기    간 : 2015년 ~ 2020년

○ 위    치 : 수영구 수영로521번길 55(광안동) 일원 ☞ 舊 공무원교육원

○ 규    모 : 대지 2,450㎡, 건물 연면적 4,029㎡(지하1층, 지상2층)

○ 투자심사 승인액 : 당초 159억원 ☞재심사 220.92억원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,442백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획
		기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 이후
계	21,442	0	2,700	1,002	3,888	13,852
국 비	3,200			282	2,022	896
시 비	7,100				905	6,195
구 비	11,142		2,700	720	961	6,761
지 방 채	0	-	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 12%)

○‘15. 04. : 수영구 국민체육센터건립 지원대상 선정

○‘15. 07. : 공유재산관리계획 승인, 지방재정투자심사 승인

○‘15. 08. : 국민체육센터건립 사전절차 추진 결정

○‘15. 12. : 공공건축사업계획 사전검토 의견 반영

○‘16. 02. : 건설기술심의위원회 심의 의결 [市 기술심사과]

○‘16. 03. : 계약심사 완료 및 설계공모 공고

○‘16. 05. : 설계용역 계약

○‘16. 08. : 국민체육센터 건립사업 변경승인

○‘16. 10. : 부산광역시 VE심사

○‘16. 12. : 부산광역시 건설기술심사

○‘17. 01. : 설계용역 완료

○‘17. 03. : 건립공사 입찰 공고

○‘17. 04. : 공사착공

□ 향후계획

○‘18. 10. : 공사 준공

○‘18. 12. : 국민체육센터 개관

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경
총사업비	15,910백만원	21,442백만원
사업규모	ㅇ 건축연면적 : 4,029㎡ ㅇ 지하1층. 지상2층 ㅇ 주요시설 : 수영장, 체육관, 체력단련장, 다목적실 등	ㅇ 건축연면적 : 4,995㎡ ㅇ 지하2층, 지상3층 ㅇ 주요시설 : 수영장, 체육관, 체력단련장, 다목적실 등

사업명

한바다중학교 다목적

학교 체육관 건립 지원사업

담당자

총무과 송용수(☎610-4792)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다목적체육관 신축으로 부족한 교육시설을 해소하고 다양한 교육과정을

수용할 수 있는 체육시설을 확보하여

○ 학생 및 지역주민을 위한 체육 문화공간으로 활용하고자 함

□ 사업개요

○ 기    간 : 2016.1. ~ 2017. 1.

○ 위    치 : 부산광역시 수영구 광안로21번가길 57

○ 규    모 : 지상2층, 연면적 1,710㎡ (지상1층 필로티, 지상2층 다목적체육관)    ○ 투자심사 승인액 : 34.03억원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,566백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획
		기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,566	0	0	668	1,239	1,659
국 비	900		0	220	261	419
시 비	340.5		0	83	99	158.5
구 비	340.5		0	83	99	158.5
교육청 (자부담)	1,985			282	780	923
민간자본	0
기 타	0

□ 추진상황(공사중 공정율 52%)

○ 2016.  7월 : 설계용역 완료 및 공사 발주

○ 2016.  9월 : 공사착공

○ 2017. 2. 12 : 화재사건 발생

○ 2017. 9. 10 : 공사재개

□ 향후계획

○ 공사완공 : 2018. 2월

□ 사업변경 내역

○ 2017. 2. 12(일) 한바다중 다목적체육관 외벽 금속패널 설치 공사 중

화재발생으로 피해복구에 따른 사업비 및 사업기간 연장에 따른 사업변경

○ 변경내역

구 분	당 초	변 경
사업비	3,386백만원	3,566백만원
공사기간	2016. 1. ~ 2017. 1	2016. 1. ~ 2018. 2.

사업명

수영구 평생학습관 건립

담당자

창조도시교육추진단

박선하(☎610-4123)

□ 사업목적

○ 인생 100세 시대를 맞아 모든 세대에 맞는 평생학습 배움터를 개관

운영하여 구민들에게 보다 다양한 평생학습 기회 제공

□ 사업개요

○ 기    간 : 2016.6. ∼ 2017.12.

○ 위    치 : 부산광역시 수영구 수영로521번길 55

○ 규    모 : 연면적 1,000㎡, 지상 3층

○ 투자심사 승인액 : 28억원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,851백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획
		기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,851	0	0	0	732	2,119
국 비	0		0
시 비	0		0
구 비	2,851		0		732	2,119
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 15%)

○ 2017.  1월 : 설계완료 성과품 검수 및 준공

○ 2017.  4월 : 공사계약 및 착공, 감리 계약

○ 2017. 12월 : 토목, 가시설, 기초공사, 평생학습관 3층 철근 배근 (공정율 15%)

○ 2018. 상반기 : 종합 운영 계획 수립, 공사 준공 및 개관 준비

사업명

수영구 장애인복지관 건립

담당자

복지서비스과 신은영

(☎610-4123)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장애인에 대한 각종 상담 및 사회심리·교육·직업·의료재활 등 지역

사회 생활에 필요한 종합적인 서비스 제공

○ 장애인들의 삶의 질 향상 및 사회통합 환경조성하고 실질적 복지증진

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016년 ~ 2018년

○ 사업위치 : 장대골로 75-4(광안동)(수영구 장애인협회)

○ 규    모 : 부지 1,279㎡, 연면적 1,650㎡(지하1층 ~ 지상4층)

○ 투자심사 승인액 : 55.05억원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,420백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획
		기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,420	0	793	0	202	5,425
국 비	0	0	0	0	0	0
시 비	4,891	0	0	0	0	4,891
구 비	1,529	0	793	0	202	534
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 25%)

○ 2015. 9월 : 장애인복지관 건립계획 수립

○ 2015. 9월 ~ 12월 : 지역사회 수요조사 실시

○ 2016. 1월 ~ 12월 : 지방재정 투자사업심사, 공유재산 관리계획 심의,

○ 2017. 7월 ~ 11월 : 복지관 건립 실시설계 및 용역

○ 2017. 10월 :  부산시 사회복지위원회 승인

○ 2017. 12월 :  건축공사 계약

□ 향후계획

○ 2018. 1월 : 공사착공

○ 2018. 12월 : 공사준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 5,505백만원 → 5,719.4백만원 변경

▷ 설계비 요율에 따라 재산정, 감리비 책임감리 적용

▷ 설계용역비 및 감리비 시비 → 구비 재원변경

○ 총사업비 5,719.4백만원 → 6,420백만원 변경

▷ 주차장 추가설치 및 면적당 공사비 추가

○ 연면적 증가  1,650㎡ → 1,769.05㎡

▷ 주차장 추가설치 등

사업명

수영구 육아종합지원센터 건립

담당자

복지서비스과 박현경

(☎ 610-4323)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어린이집 지원 및 가족·공동체의 육아기능을 보완하는 종합적인 육아서       비스 제공 센터 마련

○ 부모교육·상담, 시간제보육 및 장난감 대여 등 부모에 대한 지원서비스를       제공하는 전문적인 인프라 마련으로 출산장려 분위기 제고

□ 사업개요

○ 기    간 : 2016년 ~ 2018년

○ 위    치 : 광안동 738-1

○ 규    모 : 연면적 1,188㎡ (지하1층/지상3층)

○ 투자심사 승인액 : 44.1억원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,993백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획
		기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,993	0	0	750	863	3,380
국 비	0
시 비	0
구 비	4,993			750	863	3,380
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

□ 추진상황

○ 2017. 3월 : 육아종합지원센터 실시설계 용역 계약

○ 2017. 4월 : 해당부지(시유지) 매수 및 소유권 이전등기

○ 2017. 6월 : 기본설계에 따른 연면적 및 규모 변경 검토

※ 연면적 : 1,188㎡→1,269.7㎡/ 규모 : 지하1층,지상3층 →지상4층

○ 2017. 8월 : 육아종합지원센터 중간보고회 개최

○ 2017. 8월 : 수영구 경관심의회 심의 의결

○ 2017.10월 : 육아종합지원센터 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2017.12월 : 공사계약((주)윤창종합건설) 및 착공

□ 향후계획

○ 2018. 1월 : 기공식 개최

○ 2018. 9월 : 공사 준공 예정

□ 사업변경 내역

○ 2017.06.08. 소요예산 4,602백만원 → 4,993백만원 변경

- 연면적 증가(1,188㎡→1,274㎡), 층수 변경(지하1층,지상3층→지상4층)

사업명

광안리어방축제

담당

문화공보과 허광호(☎610-4062)

□ 사업목적

○ 지역 전통문화의 계승․보존․전파

○ 주민, 단체, 기업체의 참여확대를 통한 지역민 대화합

○ 관광활성화 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 일    시 : 매년 4월 네 번째 주 금, 토, 일 ▶ 3일간

○ 장    소 : 광안리해수욕장 일원

○ 주요행사 : 어방그물끌기 한마당, 경상좌수사행렬, 어방민속마을 등 30여종목

○ 투자심사 승인액 : 4.9억원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 2017년 총사업비 : 533백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획
		기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 이후
계	1,963	0	409	488	533	533
국 비	248		0	84	84	80
시 비	185		50	45	45	45
구 비	1,530		359	359	404	408
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

□ 추진상황

○ 2017. 12월 축제 일부행사 대행사 선정

□ 향후계획

○ 2018  1월  예산집행․홍보계획 수립, 프로그램 선정 및 공연 기획

○  “   2월  설명회(추진위, 구), 기본계획 확정․부서시달, 홍보물 디자인 확정

○  “   3월  홍보물 제작․배포, 유관기관(단체) 업무협의, 추진상황 보고회

○  “   4월  홍보물 설치, 시설물 배치, 최종 보고회, 행사실행, 집중 홍보

○  “   5~6월  축제평가․정리, 기획사 등 축제관계자 프로그램별 자체평가 회의

사업명

동수영중학교 다목적 강당 건립 지원사업

담당자

창조도시교육추진단 김경실

(☎610-4129)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다목적강당증축으로 부족한 교육시설을 해소하고 다양한 교육과정을 수용할       수 있는 교육시설과, 학생 및 지역주민을 위한 문화·체육공간을 확보코자 함

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017년 7월 ~ 2018년 9월

○ 위    치 : 부산광역시 수영구 광서로 74번길(광안동)

○ 규    모 : 연면적 4,000㎡(지상 2층)

○ 투자심사 승인액 : 31.92억원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,767백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획
		기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,767	0	0	0	0	2,767
국 비	0	0	0	0	0	0
시 비	0	0	0	0	0	0
구 비	320	0	0	0	0	320
지 방 채	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0
기 타	2,447	0	0	0	0	2,139 (교육부특교세) 308 (교육청)

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 25%)

○ 2016.  8월  해운대교육지원청⇒부산시로 다목적강당 건립 지원 요청, 구비 분담 확정

○ 2016. 10월  2017년도 학교 다목적강당 건립지원사업 미선정 통보(부산시)

○ 2016. 11월  지방비 부담액(10%) 320백만원 구비 편성 결정

○ 2016. 11월  교육경비심의위원회 심의 통과

○ 2016. 12월  2017년도 다목적강당 건립지원 예산 확정

○ 2017.  2월  특별교부금 신청(해운대교육지원청⇒교육부)

○ 2017.  4월  다목적강당 건립지원 보조금 지급(區⇒해운대교육지원청)

특별교부금 2,139백만원 확정

(1차 855백만원 확보, 2차 1,284백만원 내년도 확보 예정)

○ 2017.  9월  특별교부금 감액지원에 따라 市 교육청 자체 예산 편성

(2017년도 제2회 추가경정예산 307백만원)

○ 2017. 12월 설계용역착공(계약:17.12.19., 착공:17.12.26., 준공:18.4.4.)

○ 2018. 1월 다목적강당 건립 특별교부금(2,139,000천원) 2차분 편성, 실시설계 중   □ 향후계획

○ 2018. 4월  설계용역 완료 예정

○ 2018. 5월  공사발주 예정

○ 2018. 6월  공사착공 예정

○ 2019. 4월  공사준공 예정

사업명

수영구 공공도서관 재건축 사업

담당자

문화공보과 김재경(☎610-4064)

□ 사업목적 및 필요성

○ 이용자들의 정보 욕구 및 도서관 이용 수요 증가에 따른 맞춤형 도서관       시설 확충 필요에 따라, 기존 도서관을 재건립하여 주민의 수준 높은         지식문화 인프라를 구축하고 문화적 다양성이 공존하는 지역사회의 거점        도서관으로 만들고자 함

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017년 3월 ∼ 2020년 하반기

○ 위    치 : 부산광역시 수영구 남천동 489-33번지 외 2필지

○ 규    모 : 대지면적 6,604㎡, 연면적 4,100㎡ 이상, 지하1층/지상4층

○ 투자심사 승인액 : 159.28억원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,712백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획
		기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 이후
계	19,712	4,803	0	0	0	14,909
국 비	5,388					5,388
시 비	4,041					4,041
구 비	10,283	4,803				5,480
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

□ 향후계획

○ ‘18.  4. : 설계공모 및 심사, 업체선정

○ ‘18.  7. : 설계용역 착수

○ ‘19.  1. : 착공

○ ‘20. 하반기 : 준공 및 개관

□ 사업변경 내역

○ 수영구 도서관 재건립 기본계획 변경에 의거 총사업비 증액(2017.4.28.)

▷ 중앙 투자심사 결과 제로에너지 건축물 추진에 의한 사업비 증액

(당초) 15,928백만원 ⇒ (변경) 19,712백만원

○ 수영구 도서관 재건립사업 사업규모 변경(2018.2.12.)

(당초) 연면적 4,100㎡ ⇒ (변경) 연면적 3,900㎡.

사업명

수영구 도서관 광안분관 건립사업

담당자

문화공보과 김재경(☎610-4064)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도서관의 위치가 남천1동과 망미1동에 소재하여 정보문화 기반시설의       권역별 균형적인 성장이 요구됨

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017년 9월 ∼ 2020년 하반기

○ 위    치 : 부산광역시 수영구 광안동 1148-3번지

○ 규    모 : 대지면적 700㎡, 연면적 990㎡ 이상, 지하1층/지상3층

○ 투자심사 승인액 : 38.69억원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,869백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획
		기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,869	469				3,400
국 비	1,120					1,120
시 비	840					840
구 비	1,909	469				1,440
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 %)

○ ‘17. 1. : 광안분관 신축계획 수립

○ ‘17. 3. : 공유재산관리계획 및 지방재정투자심사 승인

○ ‘17. 4. : 문화체육관광부 공공도서관 건립지원 사전평가 결과 적정

○ ‘18. 1. : ’19년 지역발전특별회계 예산편성 요구

□ 향후계획 (‘19년 지역발전특별회계 예산 확보시)

○ ‘18. 하반기 : 설계용역

○ ‘19. ~ ’20.  : 착공 및 준공

사업명

망미2동 생활문화센터 조성

담당자

문화공보과 신정원(☎610-4065)

□ 사업목적 및 필요성

○ 망미2동은 수영구의 끝자락에 치우쳐 있어 기존 수영구의 문화인프라에 대한       접근성 부족

○ 증가하는 망미2동 및 인근 거주 주민의 생활문화욕구 충족

□ 사업개요

○ 기    간 : 2018. 1 ~ 2019. 3

○ 위    치 : 망미동 257-2번지 외2필지

○ 규    모 : 지하1층 지상4층

○ 투자심사 승인액 : 66.66억원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,666백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획
		기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,666	971	0	0	0	5,695
국 비	600					600
시 비	900					900
구 비	5,166	971				4,195
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 5%)

○ 2017. 1월 : 망미2동 복합주민센터 건립계획 수립

○ 2017. 2월 : 주민설명회 개최

○ 2017. 3월 : 수영구 공유재산관리계획 구 의회 의결

○ 2017. 3월 : 2018년 생활문화센터 조성사업 신청(문화공보과)

○ 2017. 4월 : 2018년 생활문화센터 조건부 승인(문화체육관광부)

○ 2017. 5월 : 부산시 신규투자사업 사전심사 신청

○ 2017. 7월 : 부산시 투자심사 결과 조건부 승인

○ 2017. 10월 : 제2차 추경예산 편성(설계비 198백만원)

○ 2017. 12월 : 특별교부세 교부(지역현안수요 1,300백만원)

□ 향후계획

○ 2018. 1월 : 복합커뮤니티센터 설치사업 공모(건축과)

○ 2018. 1 ~ 5 : 기본 및 실시설계

○ 2018. 6 ~ 8 : 계약심사, 건축협의 등 행정절차 이행

○ 2018. 9 ~ 2019. 3 : 공사 발주 및 준공

사업명

수영구 노인복지관 분관 건립

담당자

복지서비스과 정은숙

(☎610-4363)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고령사회를 맞아 노인들의 여가선용 공간인 기존 노인복지관의 이용자수

포화로 이용자 분산을 위한 추가 노인복지관이 필요하여

○ 수영․광안지역 노인들이 이용하기 편리하도록 노인복지관 분관을 건립하여

여유있고 활력 있는 100세 행복도시 수영 건설

□ 사업개요

○ 기    간 : 2016년 ~ 2018년

○ 위    치 : 광안동 1148-3번지

○ 규    모 : 부지 1,267㎡, 연면적 2,018㎡, 지하 1층, 지상 4층

○ 투자심사 승인액 : 67.23억원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,723백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획
		기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,723	786	0	0	300	5,637
국 비	0
시 비	2,650					2,650
구 비	4,073	786			300	2,987
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 25%)

○‘16.  1월 : 노인복지관분관건립 계획 수립

○‘17.  1월 : 노인복지관분관건립 기본 및 실시설계용역 계획 수립

○‘17.  4월 : 기본 및 실시설계 용역계약 체결(건축사무소 환인)

○‘17.  6월 : 기본 및 실시설계 사업비 변경 검토보고

○‘17.  7월 : 공유재산심의 및 공유재산관리계획변경(안)제출

○‘17.  9월 : 2018년도 기능보강사업 시 사회복지위원회 승인

○‘17. 10월 : 수영구 경관위원회 심의의결

○‘17.  10월 : 시 지방재정 투자심사 재심사(사업비 30%이상 증액) 승인

○‘17. 11월 : 기본 및 실시설계 용역 완료

○‘17. 12월 : 공사계약(대양산업건설)

□ 향후계획

○‘18. 1월 : 공사착공 (2018. 1. 25)

○‘18.  5월 : 시비보조금 예산교부신청(2018년 추경)

○‘18. 12월 : 공사준공(’19. 1월 개관예정)