109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 수영구에서 ‘18년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	총사업비	집행액		향후 소요액	사업완료 연도	최종 투자 심사연도	비 고
		기투자	2018년 사업비	2019년 이후
한바다중학교 다목적 학교 체육관 건립지원사업	3,348	3,348	-		2018	2015	완료
응답하라 수영팔도 이야기(좌수영성 일원 재창조 사업)	5,926	3,868	180	2,058	2019	2014	65%
청소년 문화의 집 등 건립	2,595	749	1,061	785	2019	2015	59%
수영구 평생학습관 건립	2,851	732	494	1,625	2019	2016	59%
수영구 장애인복지관 건립	6,420	995	253	5,172	2019	2016	50%
수영구 육아종합지원센터 건립	5,225	1,613	2,019	1,593	2019	2016	80%
동수영중학교 다목적 강당 건립 지원사업	2,967		897	2,070	2019	2016	40%
수영구 공공도서관 재건축 사업	19,712	4,803	89	14,820	2020	2017	10%
수영구 도서관 광안분관 건립 사업	3,869	469		3,400	2020	2017	5%
망미2동 생활문화센터 조성	6,315	971	948	4,396	2019	2017	11%
수영구 노인복지관 분관 건립	6,723	1,018	2,001	3,704	2019	2017 (재심사)	50%
수영구 국민체육센터 건립	24,185	7,590	6,227	10,368	2019	2018 (재심사)	59%
2019 광안리 어방축제	584		584	584	매년 추진	2018	-
호암골 노외 공영주차장건립	5,800			5,800	2020	2018	5%

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2018년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황(붙임6)

10-2. 지방채 발행사업

우리 수영구는 해당사항 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 수영구는 해당사항 없습니다.

〚붙임6〛  10-1-1. 추진 완료 된 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

한바다중학교 다목적 학교 체육관 건립 지원사업

담당자

총무과 백승진(☎610-4792)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다목적체육관 신축으로 부족한 교육시설을 해소하고 다양한 교육과정을

수용할 수 있는 체육시설을 확보하여

○ 학생 및 지역주민을 위한 체육 문화공간 으로 활용하고자 함

□ 사업개요 ☞ 투자심사내역

○ 기    간 : 2016.1. ~ 2017. 1.

○ 위    치 : 부산광역시 수영구 광안로21번가길 57

○ 규    모 : 지상2층, 연면적 1,710㎡

(지상1층 필로티, 지상2층 다목적체육관)

○ 총사업비 : 34.03억원

□ 투자심사 결과 : 적정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,566백만원 ※ 집행액 3,348백만원, 집행잔액 218백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액				집행계획
		기투자	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,348	0	668	1,239	1,441	0
국 비	845	0	220	261	364	0
시 비	319.5	0	83	99	137.5	0
구 비	319.5	0	83	99	137.5	0
교육청 (자부담)	1,864	0	282	780	802	0
민간자본	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0

□ 추진내역

○ 2016. 7.   : 설계용역 완료 및 공사 발주

○ 2016. 9.   : 공사착공

○ 2017. 2. 12 : 화재사건 발생

○ 2017. 9. 10 : 공사재개

○ 2018. 2. 12 : 공사준공

□ 사업변경 내역

○ 2017. 2. 12(일) 한바다중 다목적체육관 외벽 금속패널 설치 공사 중

화재발생으로 피해복구에 따른 사업비 및 사업기간 연장에 따른 사업변경

○ 변경내역

구 분	당 초	변 경
사 업 비	3,386백만원	3,566백만원
공사기간	2016. 1. ~ 2017. 1	2016. 1. ~ 2018. 2.

□ 완공 사진

정면 사진	배면 사진
다목적체육관 내부(정면)	다목적체육관 내부(후면)

10-2-2. 추진 중인 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

응답하라! 수영팔도 이야기

(좌수영성 일원 재창조 사업)

담당자

창조도시교육추진단

이혜진(☎610-4892)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수영의 역사적자원(수영사적공원, 좌수영성지)과 우수한 지역자원(수영강,          팔도시장)을 연계하여 지역적 특성이 반영된 장소로 재창조 경제·사회·환경적인        역할을 동시에 수행 할 수 있는 거점 공간 조성

○ 지역의 풍부한 문화·예술·역사자원을 산업화하고 관광상품 개발을 통한       지역경제 활성화 유도로 체계적이고 창조적인 거버넌스 모델 구축

○ 수영강~팔도시장~수영사적공원 간 연계사업을 통해 단절된 보행공간을 회복하여       주민이 주체가 되는 참여형 장소로 재창조 기틀 마련

□ 사업개요 ☞ 투자심사내역

○ 사업기간 : 2015년 ~ 2017년

○ 사업위치 : 부산광역시 수영구 수영동 수영사적공원, 팔도시장 일원

○ 규    모 : ◽ 좌수영성 이야기길 조성(L=1,420m, B=2~8m)

◽선소거리길 조성(L=147m, B=12m), 수영팔도장터길 조성(L=209m, B=6~8m)

◽수영재창조 아카데미 및 문화관광루트 개발 : 주민⋅상인⋅시민 아카데미

○ 총사업비 : 56.7억원

□ 투자심사 결과 : 조건부 승인

○ 중기재정계획 반영 및 국비 확보 후 추진

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,926백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액					집행계획
		기투자	2015	2016	2017	2018	2019 이후
계	5,926	0	408	550	2,730	180	2,058
국 비	2,963	0	204	274	1,366	90	1,029
시 비	1,481.5	0	102	138	682	45	514.5
구 비	1,481.5	0	102	138	682	45	514.5
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0

※ 특별교부세, 특별교부금은 구비로 포함

□ 추진상황 ☞ 공정율 65%

○ 2015. 5월 ~ 2015. 12월 : 기본계획 및 실시설계 용역완료

○ 2016. 4월 : 좌수영 이야기길 및 동문거리길 공사 발주

○ 2016. 5월 : 공사착공(1차), 의용단길, 동문거리길 조성 완료

○ 2017. 4월 : 공사 발주 및 착공(2차)

○ 2017. 6월 : 공사준공(1차), 관아거리길 및 남문거리길, 중영거리길 조성 완료

○ 2017. 12월 : 공사준공(2차), 수영팔도장터길 및 선소거리길 조성 완료

○ 2018.  2월 : 도시활력증진지역 개발사업 계획변경 승인(국토교통부)

○ 2018.  5월 : 공사(3차) 디자인개발 및 실시설계용역 착수

○ 2018. 10월 : 공사(3차) 디자인개발 및 실시설계용역 준공

○ 2018. 12월 : 공사(3차) 발주 및 착공

□ 향후계획

○ 2019.  6월 : 공사(3차) 준공 및 사업완료

□ 사업변경 내역

○ 당초 : 2018년 좌수영성 일원 주민체육시설 건설(사업비 1,232백만원)

변경 : 2018년 좌수영성 일원 빛과 물의 공간 조성(사업비 1,296백만원)

※ 사업비 증64백만원으로 세부사업 금액 증⋅감(20%이하) 경미한 변경

사 업 명	당 초(안)	변 경(안)
좌수영성 일원 재창조사업	주민체육시설 건설	빛과 물의 공간 조성 등 경관조명 및 조형물 설치
사 업 비	1,232백만원	1,296백만원
증⋅감내역	-	증64백만원

사업명

청소년 문화의 집 등 건립

담당자

복지서비스과 이정선

(☎610-4612)

□ 사업목적 및 필요성

○ 일상 속에서 자유롭게 이용할 수 있는 생활밀착시설로 청소년의 건전한

여가활동 보장을 위한 수련 및 문화 복지시설 조성

□ 사업개요 ☞ 투자심사내역

○ 기    간 : 2016. 1. ~ 2017. 12.

○ 위    치 : 부산광역시 수영구 광안동 1268-2번지 일원

○ 규    모 : 연면적 1,000㎡, 지상3층

○ 총사업비 : 20.85억원

□ 투자심사 결과 : 적정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,595백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액					집행계획
		기투자	2015	2016	2017	2018	2019 이후
계	2,595	0	0	42	707	1,061	785
국 비	1,056	0	0	42	470	63	481
시 비	72	0	0	0	11	23	38
구 비	1,467	0	0	0	226	975	266
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0

※ 특별교부세, 특별교부금은 구비로 포함

□ 추진상황 ☞ 공정율 59%

○ 2015. 2월 : 청소년문화의 집 건립 기본계획 수립

○ 2017. 1월 : 설계용역 완료

○ 2017. 4월 : 공사착공

○ 2017. 6월 : 우수관로공사 준공

○ 2017. 7월~2018. 4월 : 오염토 발생에 따른 정밀조사 및 토양정화작업

○ 2018. 4월 : 공사재개

□ 향후계획

○ 2019. 4월~5월 : 공사 준공 및 건설사업관리용역 완료

○ 2019. 6월 : 청소년문화의 집 개관

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	변경사유
시설규모	○ 지상 3층 - 연면적 : 1,000㎡	○ 지하 1층 ~ 3층 - 연면적 : 995㎡	사업비(설계비 및 감리비 포함) 증가, 주차장 면수 확대, 구거 이전비 일부
사 업 비	2,085백만원 (지특 1,056, 시비 144, 구비 885)	2,595백만원 (균특 1,056, 시비 72, 구비 1,467)
사업기간	2016년 ~ 2017년	2016년 ~ 2019년	오염토 발견으로 인한 공사 기간 연장

사업명

수영구 평생학습관 건립

담당자

창조도시교육추진단 허영란

(☎610-4122)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인생 100세 시대를 맞아 모든 세대에 맞는 평생학습 배움터를 개관

운영하여 구민들에게 보다 다양한 평생학습 기회 제공

□ 사업개요 ☞ 투자심사내역

○ 기    간 : 2016.6. ∼ 2017.12.

○ 위    치 : 부산광역시 수영구 수영로521번길 55

○ 규    모 : 연면적 1,000㎡, 지상 3층

○ 총사업비 : 28억원

□ 투자심사 결과 : 적정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,851백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액					집행계획
		기투자	2015	2016	2017	2018	2019 이후
계	2,851	0	0	0	732	494	1,625
국 비	0	0	0	0	0	0	0
시 비	0	0	0	0	0	0	0
구 비	2,851	0	0	0	732	494	1,625
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진상황 ☞ 공정율 59%

○ 2016.  4월 : 평생학습관 건립계획 수립

○ 2017.  4월 : 공사계약 및 착공, 감리계약

○ 2017. 11월 ~ 2018. 3월 : 오염토 반출 정화관련 공사 중지

○ 2018. 12월 : 토목, 가시설, 기초공사, 평생학습관 철근 배근

□ 향후계획

○ 2019. 4월  : 준공

○ 2019. 5월  : 개관준비 및 시범운영

○ 2019. 6월  : 개관

사업명

수영구 장애인복지관 건립

담당자

복지서비스과 서보은

(☎610-4163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장애인에 대한 각종 상담 및 사회심리·교육·직업·의료재활 등 지역

사회 생활에 필요한 종합적인 서비스 제공

○ 장애인들의 삶의 질 향상 및 사회통합 환경조성하고 실질적 복지증진

□ 사업개요 ☞ 투자심사내역

○ 사업기간 : 2016년 ~ 2018년

○ 사업위치 : 장대골로 75-4(광안동)(수영구 장애인협회)

○ 규    모 : 부지 1,279㎡, 연면적 1,650㎡(지하1층 ~ 지상4층)

○ 총사업비 : 55.05억원

□ 투자심사 결과 : 조건부 승인

○ 세부사업계획 및 관리운영계획 (수지전망 등)에 대한 구체적인 계획수립필요

○ 기능보강사업 시사회복지위원회 심의결과에 따라 사업추진

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,420백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액					집행계획
		기투자	2015	2016	2017	2018	2019 이후
계	6,420	793	0	0	202	253	5,172
국 비	0	0	0	0	0	0	0
시 비	4,891	0	0	0	0	148	4,743
구 비	1,529	793	0	0	202	105	429
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0

※ 특별교부세, 특별교부금은 구비로 포함

□ 추진상황 ☞ 공정율 50%

○ 2015. 9월 : 장애인복지관 건립계획 수립

○ 2015. 9월 ~ 12월 : 지역사회 수요조사 실시

○ 2016. 1월 ~ 12월 : 지방재정 투자사업심사, 공유재산 관리계획 심의,

○ 2017. 7월 ~ 11월 : 복지관 건립 실시설계 및 용역

○ 2018.  1월 : 건축공사 착공

○ 2018. 12월 : 2층 철근 및 콘크리트 공사 중

□ 향후계획

○ 2019. 10월 : 공사준공 및 개관(예정)

○ 2019년 하반기 : 장애인복지관 운영

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 5,505백만원 → 5,719.4백만원 변경

▷ 설계비 요율에 따라 재산정, 감리비 책임감리 적용

▷ 설계용역비 및 감리비 시비 → 구비 재원변경

○ 총사업비 5,719.4백만원 → 6,420백만원 변경

▷ 주차장 추가설치 및 면적당 공사비 추가

○ 연면적 증가  1,650㎡ → 1,769.05㎡

▷ 주차장 추가설치 등

사업명

수영구 육아종합지원센터 건립

담당자

복지서비스과 박희영

(☎610-4323)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어린이집 지원 및 가족·공동체의 육아기능을 보완하는 종합적인 육아서비스 제공을 위한 센터 마련

○ 부모교육·상담, 시간제보육 및 장난감 대여 등 부모에 대한 지원서비스를       제공하는 전문적인 인프라 마련으로 출산장려 분위기 제고

□ 사업개요 ☞ 투자심사내역

○ 기    간 : 2016년 ~ 2018년

○ 위    치 : 광안동 738-1

○ 규    모 : 연면적 1,188㎡ (지하1층/지상3층)

○ 총사업비 : 44.1억원

□ 투자심사 결과 : 조건부 승인

○ 중기지방재정계획 반영

○ 육아종합 지원센터 운영 활성화 계획 수립 필요

○ 시비 추가부담 없는 조건으로 추진

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,513백만원 ※ 5,225백만원 집행 예정

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액					집행계획
		기투자	2015	2016	2017	2018	2019 이후
계	5,225	0	0	750	863	2,019	1,593
국 비	0	0	0	0	0	0	0
시 비	0	0	0	0	0	0	0
구 비	5,225	0	0	750	863	2,019	1,593
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0

※ 특별교부세, 특별교부금은 구비로 포함

□ 추진상황 ☞ 공정율 80%

○ 2017. 3월 : 육아종합지원센터 실시설계 용역 계약

○ 2017. 4월 : 해당부지(시유지) 매수 및 소유권 이전등기

○ 2017. 6월 : 기본설계에 따른 연면적 및 규모 변경 검토

※ 연면적 : 1,188㎡→1,269.7㎡/ 규모 : 지하1층,지상3층 →지상4층

○ 2017. 8월 : 육아종합지원센터 중간보고회 개최

○ 2017. 8월 : 수영구 경관심의회 심의 의결

○ 2017.10월 : 육아종합지원센터 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2017.12월 : 공사계약((주)윤창종합건설) 및 착공

○ 2018.11월 : 건축공사준공

○ 2019. 1월 : 내부시설 설치공사 착공

□ 향후계획

○ 2019. 4월 : 내부설치 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 2017. 6. 8. 소요예산 4,602백만원 → 4,993백만원 변경

- 연면적 증가(1,188㎡→1,269.7㎡), 층수 변경(지하1층,지상3층→지상4층)

○ 2017.10.11. 소요예산 520백만원 증가

- 내부설치공사(400백만원), 자산취득비(120백만원)

사업명

동수영중학교 다목적 강당 건립 지원사업

담당자

창조도시교육추진단 권연경

(☎610-4129)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다목적강당증축으로 부족한 교육시설을 해소하고 다양한 교육과정을 수용할       수 있는 교육시설과, 학생 및 지역주민을 위한 문화·체육공간을 확보코자 함

□ 사업개요 ☞ 투자심사내역

○ 기    간 : 2017년 7월 ~ 2018년 9월

○ 위    치 : 부산광역시 수영구 광서로 74번길(광안동)

○ 규    모 : 연면적 4,000㎡(지상 2층)

○ 총사업비 : 31.92억원

□ 투자심사 결과 : 적정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,967백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액					집행계획
		기투자	2015	2016	2017	2018	2019 이후
계	2,967	0	0	0	0	897	2,070
국 비	0	0	0	0	0	0	0
시 비	0	0	0	0	0	0	0
구 비	520	0	0	0	0	320	200
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	2,447	0	0	0	0	269 (교육부특교세) 308 (교육청)	1,870 (교육부특교세)

□ 추진상황 ☞ 공정율 40%

○ 2016.  8월  해운대교육지원청⇒부산시로 다목적강당 건립 지원 요청, 구비 분담 확정

○ 2016. 10월  2017년도 학교 다목적강당 건립지원사업 미선정 통보(부산시)

○ 2016. 11월  지방비 부담액(10%) 320백만원 구비 편성 결정

○ 2016. 11월  교육경비심의위원회 심의 통과

○ 2016. 12월  2017년도 다목적강당 건립지원 예산 확정

○ 2017.  2월  특별교부금 신청(해운대교육지원청⇒교육부)

○ 2017.  4월  다목적강당 건립지원 보조금 지급(區⇒해운대교육지원청)

특별교부금 2,139백만원 확정

(1차 855백만원 확보, 2차 1,284백만원 내년도 확보 예정)

○ 2017.  9월  특별교부금 감액지원에 따라 市 교육청 자체 예산 편성

(2017년도 제2회 추가경정예산 307백만원)

○ 2017. 12월 설계용역착공(계약:17.12.19., 착공:17.12.26., 준공:18.4.4.)

○ 2018. 1월 다목적강당 건립 특별교부금(2,139,000천원) 2차분 편성, 실시설계 중

○ 2018. 4월 설계용역 완료

○ 2018. 6월 공사발주

○ 2018. 7월 공사착공

□ 향후계획

○ 2019. 5월 중순 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경

▷ (당초) 2,767백만원 ⇒ (변경) 2,967백만원

▷ 사유 : 2019년 기자재 구입비 200백만원 추가 지원

사업명

수영구 공공도서관 재건축 사업

담당자

문화관광과 김재경(☎610-4064)

□ 사업목적 및 필요성

○ 이용자들의 정보 욕구 및 도서관 이용 수요 증가에 따른 맞춤형 도서관       시설 확충 필요에 따라, 기존 도서관을 재건립하여 주민의 수준 높은         지식문화 인프라를 구축하고 문화적 다양성이 공존하는 지역사회의 거점        도서관으로 만들고자 함

□ 사업개요 ☞ 투자심사내역

○ 기    간 : 2017년 3월 ∼ 2020년 하반기

○ 위    치 : 부산광역시 수영구 남천서로 33 외 2필지

○ 규    모 : 대지면적 6,604㎡, 연면적 4,100㎡ 이상, 지하1층/지상4층

○ 총사업비 : 159.28억원

□ 투자심사 결과 : 조건부 승인

○ 건립 후 유지관리 비용 최소화를 위해 제로 에너지 건축물 추진

○ 열람과 학습이 가능하도록 자료실내 열람공간 등 시설 활용도를 높일 수       있도록 구성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,712백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액					집행계획
		기투자	2015	2016	2017	2018	2019 이후
계	19,712	4,803	0	0	0	89	14,820
국 비	5,388	0	0	0	0	64	5,324
시 비	4,041	0	0	0	0	2	4,039
구 비	10,283	4,803	0	0	0	23	5,457
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0

※ 특별교부세, 특별교부금은 구비로 포함

□ 추진상황 ☞ 기본설계용역 단계

○ ‘18. 11. ~ ’19. 4. : 기본 및 실시설계용역

□ 향후계획

○ ‘19.  4. : 설계용역 완료

○ ‘19.  7. : 착공

○ ‘20. 12. : 준공

□ 사업변경 내역

○ 수영구 도서관 재건립 기본계획 변경에 의거 총사업비 증액(2017.4.28.)

▷ 중앙 투자심사 결과 제로에너지 건축물 추진에 의한 사업비 증액

(당초) 15,928백만원 ⇒ (변경) 19,712백만원

○ 수영구 도서관 재건립사업 사업규모 변경(2018.2.12.)

(당초) 연면적 4,100㎡ ⇒ (변경) 연면적 3,900㎡

사업명

수영구 도서관 광안분관 건립사업

담당자

문화관광과 박채령(☎610-4065)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도서관의 위치가 남천1동과 망미1동에 소재하여 정보문화 기반시설의       권역별 균형적인 성장이 요구됨

□ 사업개요 ☞ 투자심사내역

○ 기    간 : 2017년 9월 ∼ 2020년 하반기

○ 위    치 : 부산광역시 수영구 광안동 1148-3번지

○ 규    모 : 대지면적 700㎡, 연면적 990㎡ 이상, 지하1층/지상3층

○ 총사업비 : 38.69억원

□ 투자심사 결과 : 적정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,869백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액					집행계획
		기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,869	469	0	0	0	0	3,400
국 비	1,120	0	0	0	0	0	1,120
시 비	840	0	0	0	0	0	840
구 비	1,909	469	0	0	0	0	1,440
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진상황 ☞ 공정율 5%

○ ‘17. 1. : 광안분관 신축계획 수립

○ ‘17. 3. : 공유재산관리계획 및 지방재정투자심사 승인

○ ‘17. 4. : 문화체육관광부 공공도서관 건립지원 사전평가 결과 적정

○ ‘18. 9. : 설계용역비 편성(2회추경, 153백만원)

□ 향후계획

○ ‘19. 1 : 설계용역

○ ‘19. 6 : 공사착공

○ ‘20. 2 : 공사완공

○ ‘20. 4 : 개관

사업명

망미2동 생활문화센터 조성

담당자

문화관광과 박채령(☎610-4065)

□ 사업목적 및 필요성

○ 망미2동은 수영구의 끝자락에 치우쳐 있어 기존 수영구의 문화인프라에 대한       접근성 부족

○ 증가하는 망미2동 및 인근 거주 주민의 생활문화욕구 충족

□ 사업개요 ☞ 투자심사내역

○ 기    간 : 2018.1~2019.3

○ 위    치 : 망미동 257-2번지 외2필지

○ 규    모 : 지하1층 지상4층

○ 총사업비 : 66.66억

□ 투자심사 결과 : 조건부 승인

○ 시, 수영구 중기지방재정계획 반영 및 재원조달계획 확정 후 추진

○ 신축비용 단계별(기본설계, 공사 계약, 설계변경, 준공) 주민공개 이행

○ 에너지 효율 등급을 고려한 기능 중심의 공간설계 필요

○ 주민 수요조사 등을 통한 세부 운영계획 수립 필요

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,315백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액					집행계획
		기투자	2015	2016	2017	2018	2019 이후
계	6,315	971	0	0	0	948	4,396
국 비	600	0	0	0	0	232	368
시 비	130	0	0	0	0	130	0
구 비	5,585	971	0	0	0	586	4,028
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0

※ 특별교부세, 특별교부금은 구비로 포함

□ 추진상황 ☞ 공정율 11%

○ 2017년 1월 : 망미2동 복합주민센터 건립계획 수립

○ 2017년 2월 : 주민설명회 개최

○ 2017년 3월 : 공유재산관리계획 구 의회 의결

○ 2017년 4월 : 생활문화센터 조건부 승인 (문체부)

○ 2017년 7월 : 투자사업 심사 조건부 승인 (부산광역시)

○ 2018년 2월 : 기본 및 실시설계

○ 2018년 9월 : 공종별 공사발주

□ 향후계획

○ 2019년 10월 : 공사 준공

○ 2019년 11월 : 개소