109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 수영구에서 ‘19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년 이후
청소년 문화의 집 등 건립	2,595	1,810	785	-	2019	2015	완료
수영구 평생학습관 건립	2,756	1,227	1,529	-	2019	2016	완료
수영구 장애인복지관 건립	5,657	1,248	4,409	-	2019	2016	완료
수영구 육아종합 지원센터 건립	5,513	3,632	1,881	-	2019	2016	완료
동수영중학교 다목적 강당 건립 지원사업	2,684	1,032	1,652	-	2019	2016	완료
망미2동 생활문화센터 조성	5,994	1,919	4,075	-	2019	2017	완료
수영구 노인복지관 분관 건립	6,723	2,773	950	-	2019	2017 (재심사)	완료
수영구 국민체육센터 건립	24,185	13,817	10,368	-	2019	2018 (재심사)	완료
2019 광안리어방축제	-	1,574	600	-	매년 추진	2018	-
응답하라 수영팔도이야기 (좌수영성 재창조 사업)	5,926	3,868	1,704	354	2020	2014	94
수영구 공공도서관 재건축 사업	19,712	4,892	663	14,157	2021	2017	20
수영구 도서관 광안분관 건립 사업	3,869	469	112	3,288	2020	2017	30
호암골 노외공영 주차장 건립	5,800	-	124	5,676	2020	2018	10
광안리어방축제	-	531	600	-	매년 추진	2019	10
민안초등학교 다목적 강당 증축지원사업	2,357	-	-	2,357	2021	2019	0
기부금 활용 민간어린이집 매입 사업	2,422	-	210	2,212	2020	2019	20

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2019년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황 (붙임6)

10-2. 지방채 발행사업

우리 수영구는 해당사항 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 수영구는 해당사항 없습니다.

〚 붙임6 〛 10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

청소년 문화의 집 등 건립

담당자

복지정책과 박명이(☎610-4612)

□ 사업목적

○ 청소년의 여가활동 보장을 위한 수련 및 문화 복지시설 조성

○ 체험활동, 학습지원 및 지역사회 연계사업 등에 대한 수요 증가에 따른 청소년        프로그램 운영

□ 사업개요

○ 기   간 : 2015. 1월 ~ 2019. 6월

○ 위   치 : 부산광역시 수영구 수영로521번길 77(광안동)

○ 규   모 : 대지 9,913㎡, 연면적 996.52㎡(지하1층/지상3층)

□ 투자심사 결과 : 적정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,595백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액
		기투자	2015	2016	2017	2018	2019
계	2,595	0	0	42	707	1,061	785
국 비	1,056			42	470	63	481
시 비	72				11	23	38
구 비	1,467				226	975	266
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

※ 특별교부세, 특별교부금은 구비로 포함

□ 추진내역

○  2015. 2월 청소년문화의 집 건립 기본계획 수립

○  2016. 8월 제2차 건립심의위원회 개최(기본설계(안)_원안가결)

○  2017. 1월 설계용역 준공 및 검수

○  2017. 3월 공사 및 감리계약

○  2017. 4월 공사착공

○  2017. 6월 우수관로공사 준공

○  2017. 7월~2018. 4월 오염토 발생에 따른 정밀조사 및 토양정화작업

○  2018. 4월~7월 터파기 기초공사 진행(공사재개)

○  2019. 6월 공사준공 및 청소년상담복지센터 이전

○  2019. 7월 16일 청소년문화의 집 개관

사업명

수영구 평생학습관 건립

담당자

창조도시교육추진단 김명옥

(☎610-4122)

□ 사업목적

○ 인생 100세 시대를 맞아 모든 세대에 맞는 평생학습 배움터를 개관      운영하여 구민들에게 보다 다양한 평생학습 기회 제공

□ 사업개요 ☞ 투자심사내역

○ 기   간 : 2016. 6. ~ 2017.12.

○ 위   치 : 부산광역시 수영구 수영로521번길 55

○ 규   모 : 연면적 1,000㎡, 지상 3층

□ 투자심사 결과 : 적정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,756백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액
		기투자	2015	2016	2017	2018	2019
계	2,756	0	0	0	733	494	1,529
국 비	0
시 비	0
구 비	2,756				733	494	1,529
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

□ 추진내역

○ 2016.  4월 : 평생학습관 건립계획 수립

○ 2017.  4월 : 공사계약 및 착공, 감리계약

○ 2017. 11월 ~ 2018. 3월 : 오염토 반출 정화관련 공사 중지

○ 2019.  5월 : 수영구 스포츠문화타운(평생학습관) 건립공사 준공

○ 2019.  7월 : 수영구 평생학습관 개관

□ 사업변경 내역

구 분	변경 전(당초)	변경 후(최종)
사업규모	1,000㎡	993.94㎡
총사업비	2,800	2,756

사업명

수영구 장애인복지관 건립

담당자

가족행복과 서보은(☎610-4163)

□ 사업목적

○ 장애인에 대한 각종 상담 및 사회심리□교육□직업□의료재활 등 지역사회

생활에 필요한 종합적인 서비스 제공

○ 장애인들의 삶의 질 향상과 실질적 복지증진 및 사회적 인식개선사업 수행

□ 사업개요

○ 기    간 : 2016년 ~ 2018년

○ 위    치 : 부산광역시 수영구 장대골로 75-4(광안동)

○ 규    모 : 부지 1,279㎡, 연면적 1,650㎡(지하1층 ~ 지상4층)

○ 총사업비 : 55.05억원

□ 투자심사 결과 : 조건부 승인

○ 세부사업계획 및 관리운영계획(수지전망 등)에 대한 구체적인 계획수립필요

○ 기능보강사업 시사회복지위원회 심의결과에 따라 사업추진

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,657백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액
		기투자	2015	2016	2017	2018	2019
계	5,657	793	0	0	202	253	4,409
국 비	0
시 비	4,328					148	4,180
구 비	1,329	793			202	105	229
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

□ 추진내역

○ 2015. 9월 : 장애인복지관 건립계획 수립

○ 2015. 9월 ~ 12월 : 지역사회 수요조사 실시

○ 2016. 1월 ~ 12월 : 지방재정 투자사업 심사, 공유재산 관리계획 심의

○ 2017. 7월 ~ 11월 : 복지관 건립 실시설계 및 용역

○ 2018. 1월 ~ 2019. 9월 : 건축공사

○ 2019. 11월 : 장애인복지관 개관

□ 사업변경 내역

○ 총예산액 5,505백만원 → 5,719.4백만원 변경

▷ 설계비 요율에 따라 재산정, 감리비 책임감리 적용

▷ 설계용역비 및 감리비 시비 → 구비 재원변경

○ 총예산액 5,719.4백만원 → 6,420백만원 변경

▷ 주차장 추가 설치 및 면적당 공사비 추가

○ 연면적 증가 1,650㎡ → 1,769.05㎡

▷ 주차장 추가설치 등

사업명

수영구 육아종합지원센터 건립

담당자

가족행복과 박희영(☎610-4323)

□ 사업목적

○ 어린이집 지원 및 가족·공동체의 육아기능을 보완하는 종합적인 육아서비스

제공을 위한 센터 마련

○ 부모교육·상담, 시간제보육 및 장난감 대여 등 부모에 대한 지원서비스를       제공하는 전문적인 인프라 마련으로 출산장려 분위기 제고

□ 사업개요

○ 기    간 :  2016년 ~ 2019년

○ 위    치 :  부산광역시 수영구 장대골로 20-14(광안동)

○ 규    모 :  연면적 1,269.7㎡ (지상4층)

○ 총사업비 :  55.13억원

□ 투자심사 결과 : 조건부 승인

○ 중기지방재정계획 반영

○ 육아종합 지원센터 운영 활성화 계획 수립 필요

○ 시비 추가부담 없는 조건으로 추진

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,513백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액
		기투자	2015	2016	2017	2018	2019
계	5,513	0	0	750	863	2,019	1,881
국 비	0	0	0	0	0	0	0
시 비	0	0	0	0	0	0	0
구 비	5,513	0	0	750	863	2,019	1,881
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진내역

○ 2017. 3월 : 육아종합지원센터 실시설계 용역 계약

○ 2017. 4월 : 해당부지(시유지) 매수 및 소유권 이전등기

○ 2017. 6월 : 기본설계에 따른 연면적 및 규모 변경 검토

※ 연면적 : 1,188㎡→1,269.7㎡/ 규모 : 지하1층,지상3층 →지상4층

○ 2017. 8월 : 육아종합지원센터 중간보고회 개최

○ 2017. 8월 : 수영구 경관심의회 심의 의결

○ 2017.10월 : 육아종합지원센터 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2017.12월 : 공사계약((주)윤창종합건설) 및 착공

○ 2018.11월 : 건축공사준공

○ 2019. 1월 : 내부시설 설치공사 착공

○ 2019. 6월 : 수영구 육아종합지원센터 개원

□ 사업변경 내역

○ 2017.06.08. 소요예산 4,602백만원 → 4,993백만원 변경

- 연면적 증가(1,188㎡→1,269.7㎡), 층수 변경(지하1층,지상3층→지상4층)

○ 2017.10.11. 소요예산 520백만원 증가

- 내부설치공사(400백만원), 자산취득비(120백만원)

사업명

동수영중학교 다목적강당 건립 지원사업

담당자

창조도시교육추진단 권연경

(☎610-4129)

□ 사업목적

○ 다양한 교육과정 운영 및 학교행사를 진행,  학생들의 체력증진과 인성발달에       기여하고 지역주민들의 평생학습 공간, 문화센터로서의 역할 수행 기대

□ 사업개요

○ 기   간 : 2017년 7월 ～ 2019년 5월

○ 위   치 : 부산광역시 수영구 광서로 74(광안동)

○ 규   모 : 지상 2층 규모의 다목적강당(건축면적 2,000㎡, 연면적 4,000㎡)

□ 투자심사 결과 : 적정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,684백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액
		기투자	2015	2016	2017	2018	2019
계	2,684	0	0	0	0	1,032	1,652
국 비	0
시 비	0
구 비	296					114	182
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	2,388					761 (교육부특교금) 157 (교육청)	1,218 (교육부특교금) 252 (교육청)

□ 추진내역

○ 2016.  8월 :	해운대교육지원청⇒부산시로 다목적강당 건립 지원 요청, 구비 분담 확정

○ 2016. 10월 :	2017년도 학교 다목적강당 건립지원사업 미선정 통보(부산시)

○ 2016. 11월 :	지방비 부담액(10%) 320백만원 구비 편성 결정

○ 2016. 11월 :	교육경비심의위원회 심의 통과

○ 2016. 12월 :	2017년도 다목적강당 건립지원 예산 확정

○ 2017.  2월 :	특별교부금 신청(해운대교육지원청⇒교육부)

○ 2017.  4월 :	다목적강당 건립지원 보조금 지급(區⇒해운대교육지원청)

특별교부금 2,139백만원 확정

(1차 855백만원 확보, 2차 1,284백만원 내년도 확보 예정)

○ 2017.  9월 :  특별교부금 감액지원에 따라 市 교육청 자체 예산 편성

(2017년도 제2회 추가경정예산 307백만원)

○ 2017.12.19. : 설계용역 착수

○ 2018.04.04. : 설계용역 완료

○ 2018.07.30. : 공사 착공

○ 2019.05.25. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

망미2동 생활문화센터 조성

담당자

문화관광과 박채령(☎610-4065)

□ 사업목적

○ 망미2동은 수영구의 끝자락에 치우쳐 있어 기존 수영구의 문화인프라에 대한       접근성 부족

○ 증가하는 망미2동 및 인근 거주 주민의 생활문화욕구 충족

□ 사업개요

○ 기    간 : 2018. 1. ~ 2019. 11.

○ 위    치 : 부산광역시 수영구 망미동 257-2번지 외2필지

○ 규    모 : 지하1층 지상4층

○ 총사업비 : 66.66억

□ 투자심사 결과

○ 조건부

○ 시, 수영구 중기지방재정계획 반영 및 재원조달계획 확정 후 추진

○ 신축비용 단계별(기본설계, 공사 계약, 설계변경, 준공) 주민공개 이행

○ 에너지 효율 등급을 고려한 기능 중심의 공간설계 필요

○ 주민 수요조사 등을 통한 세부 운영계획 수립 필요

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,315백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액
		기투자	2015	2016	2017	2018	2019
계	5,994	971	0	0	0	948	4,075
국 비	601					232	369
시 비	130					130
구 비	4,292					586	3,706
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	971	971

□ 추진내역

○ 2017년  1월 : 망미2동 복합주민센터 건립계획 수립

○ 2017년  2월 : 주민설명회 개최

○ 2017년  3월 : 공유재산관리계획 구 의회 의결

○ 2017년  4월 : 생활문화센터 조건부 승인 (문체부)

○ 2017년  7월 : 투자사업 심사 조건부 승인 (부산광역시)

○ 2018년  2월 : 기본 및 실시설계

○ 2018년  9월 : 공종별 공사발주

○ 2019년 10월 : 공사 준공

○ 2019년 11월 : 개소식 개최

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

수영구 노인복지관 분관 건립

담당자

가족행복과 정은연(☎610-4363)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고령사회를 맞아 노인들의 여가선용 공간인 기존 노인복지관의 이용자수

포화로 이용자 분산을 위한 추가 노인복지관이 필요하여

○ 수영ㆍ광안지역 노인들이 이용하기 편리하도록 노인복지관 분관을 건립하여

여유있고 활력 있는 100세 행복도시 수영 건설

□ 사업개요

○ 기    간 : 2016년 ~ 2019년

○ 위    치 : 부산광역시 수영구 장대골로 75-8(광안동 1148-3)

○ 규    모 : 부지 1,267㎡, 연면적 2,018㎡, 지하 1층, 지상 4층

○ 총사업비 : 6,723백만원

□ 투자심사 결과 : 적정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,723백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액
		기투자	2015	2016	2017	2018	2019
계	6,723	786	0	0	3,287	1,700	950
국 비	0	0	0	0	0	0	0
시 비	1,700	0	0	0	0	1,700	0
구 비	5,023	786	0	0	3,287	0	950
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0

※ 특별교부세, 특별교부금은 구비로 포함

□ 추진내역

○‘17.  6월 : 기본 및 실시설계 사업비 변경 검토보고

○‘17.  7월 : 공유재산심의 및 공유재산관리계획변경(안)제출

○‘17.  9월 : 2018년도 기능보강사업 시 사회복지위원회 승인

○‘17. 10월 : 수영구 경관위원회 심의의결

○‘17. 10월 : 시 지방재정 투자심사 재심사(사업비 30%이상 증액) 승인

○‘17. 11월 : 기본 및 실시설계 용역 완료

○‘17. 12월 : 제1차 공사계약(대양산업건설) ▸ ‘18.01.25. 착공

○‘18.  1월 : 건축공사 착공

○‘18. 11월 : 제2차 공사계약 ▸ ‘18.11.09. 착공

○‘19.  1월 : 제3차 공사계약 ▸ ‘19.01.24. 착공

○‘19.  6월 : 제4차 공사계약 ▸ ‘19.06.12. 착공

○‘19.  6월 : 제4차 공사계약, 부산시 시공감사 완료(청렴감사담당관-10097)

○‘19.  9월 : 2019.9.2. 준공

□ 향후계획

○‘20.  1월 : 광안노인복지관 개관식 및 운영

사업명

수영구 국민체육센터 건립

담당자

총무과 마가형(☎610-4795)

□ 사업목적

○ 급증하는 생활체육 수요증가에 따른 공공체육시설의 확충으로 구민체력

증진 및 삶의 질 향상

○ 어린이, 청소년, 노인, 장애인 등 다양한 지역주민의 체육활동 기반 조성

□ 사업개요

○ 기    간 : 2015년 ~ 2019년

○ 위    치 : 부산광역시 수영구 수영로521번길 77(광안동) 일원 ☞ 舊 공무원교육원

○ 규    모 : 대지 2,450㎡, 건물 연면적 4,995㎡(지하2층, 지상3층)

○ 총사업비 : 24,185백만원

□ 투자심사 결과 : 조건부 승인

○ 중기재정계획(市) 반영

○ 수영장 등 주요 시설별 이용객 증대를 위한 구체적인 편의 및 수익시설

설치방안 마련

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 24,185백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액
		기투자	2015	2016	2017	2018	2019
계	24,185	0	2,700	1,002	3,888	6,227	10,368
국 비	3,200	0	0	282	2,022	199	697
시 비	7,100	0	0	0	905	3,169	3,026
구 비	13,885	0	2,700	720	961	2,859	6,645
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0

※ 특별교부세, 특별교부금은 구비로 포함

□ 추진상황

○‘15. 04. : 수영구 국민체육센터건립 지원대상 선정

○‘15. 07. : 공유재산관리계획 승인, 지방재정투자심사 승인

○‘15. 08. : 국민체육센터건립 사전절차 추진 결정

○‘15. 12. : 공공건축사업계획 사전검토 의견 반영

○‘16. 02. : 건설기술심의위원회 심의 의결 [市 기술심사과]

○‘16. 03. : 계약심사 완료 및 설계공모 공고

○‘16. 05. : 설계용역 계약

○‘16. 08. : 국민체육센터 건립사업 변경승인

○‘16. 10. : 부산광역시 VE심사

○‘16. 12. : 부산광역시 건설기술심사

○‘17. 01. : 설계용역 완료

○‘17. 03. : 건립공사 입찰 공고

○‘17. 04. : 공사착공

○‘19. 06. : 국민체육센터 사용승인 및 준공

○‘19. 07. : 국민체육센터 개관

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 증액 : 당초 22,092백만원 ⇒ 변경 24,185백만원

○ 증액사유

▷ 물가변동으로 인한 계약금액 조정

▷ 오염토 처리비 추가

▷ 공기연장으로 인한 간접비 증가

▷ 파이프서포트 변경

▷ 지하수 활용 기계설비 반영 등

사업명

2019 광안리어방축제

담당자

문화관광과 김정선(☎610-4062)

□ 사업목적

○ 전국 유일 전통어촌마을의 민속문화를 주제로 지역 전통문화의 계승․보존․전파

○ 주민, 단체, 기업체의 참여확대를 통한 일자리 창출 및 지역민 대화합

○ 천혜의 관광자원 바다와 연계한 관광활성화 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기   간 : 2019. 4. 26.(금) ~ 4. 28.(일)

○ 위   치 : 광안리해수욕장 일원

○ 규   모 : 5개 분야 35개 프로그램

□ 투자심사 결과 : 조건부

○ 시비 지원 여부 미확정 상태로 지원규모 축소시 구비 확보 방안 마련하여 시행

○ 이전 축제에 대한 성과분석을 통한 개선방안 도출 및 효율적인 운영방안       마련과 행사 결과에 대한 평가 정례화

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액
		기투자	2015	2016	2017	2018	2019
계	2,478	0	380	459	489	550	600
국 비	248			84	84	80
시 비	300		50	45	45	65	95
구 비	1,930		330	330	360	405	505
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

※ 특별교부세, 특별교부금은 구비로 포함

□ 추진내역

○ 축제프로그램

구 분	프로그램명
대표프로그램(2)	① 뮤지컬“어방” ② 경상좌수사행렬
주 제 프로그램(6)	① 어방그물끌기 한마당 ② 진두어화 ③ 어방민속마을(전시·체험) ④ 수문장교대식 ⑤ 망궐례 ⑥ 무형문화재공연(수영야류, 수영농청놀이)
문화ㆍ공연 프로그램(8)	① 개막공연 ② 폐막공연 ③ 어방문화공연 ④ 어방꾸러기음악회 ⑤ 거리퍼레이드 앵콜공연 ⑥ 세계민속페스티벌 ⑦ 수군무예공연 ⑧ 어방마당극
참여ㆍ체험 프로그램(12)	① 맨손으로 활어잡기 ② 어방수라간 ③ 생선 통구이 체험 ④ 활어요리 경연대회 ⑤ 생선회 깜짝경매 ⑥ 내왕소리 체험 ⑦ 우리옷 체험 ⑧ 수영성 유물발굴·복원체험 ⑨ 수영성 민속대결 모기장 비치시네마 ⑪ 그림․글짓기대회 ⑫ 사진공모전
부대행사 (7)	① 윈드서핑대회 ② 문화예술의거리(자율공연, 수공예품·기념품 판매) ③ 소망등 ④ 먹거리장터 ⑤ 특산물장터 ⑥ 싱싱활어장터 ⑦ 업소가격할인행사

○ 축제 평가 결과

구 분	관광객(명)				관광객 만족도 (7점 척도)	경제효과 (백만원)
	계(A=B＋C)	내국인(B)		외국인 (C)
		지역주민	지역 외
광안리 어방축제	148,031	40,560	107,471	지역외 포함	5.85	7,850

사업명

응답하라! 수영팔도 이야기

(좌수영성 일원 재창조 사업)

담당자

창조도시교육추진단 이근표

(☎610-4892)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수영의 역사적자원(수영사적공원, 좌수영성지)과 우수한 지역자원(수영강,          팔도시장)을 연계하여 지역적 특성이 반영된 장소로 재창조 경제·사회·환경적인        역할을 동시에 수행 할 수 있는 거점 공간 조성

○ 지역의 풍부한 문화·예술·역사자원을 산업화하고 관광상품 개발을 통한       지역경제 활성화 유도로 체계적이고 창조적인 거버넌스 모델 구축

○ 수영강~팔도시장~수영사적공원 간 연계사업을 통해 단절된 보행공간을 회복하여       주민이 주체가 되는 참여형 장소로 재창조 기틀 마련

□ 사업개요

○ 기   간 : 2015년 ~ 2017년

○ 위   치 : 부산광역시 수영구 수영동 수영사적공원, 팔도시장 일원

○ 규   모 :◽ 좌수영성 이야기길 조성(L=1,420m, B=2~8m)

◽선소거리길 조성(L=147m, B=12m), 수영팔도장터길 조성(L=209m, B=6~8m)

◽수영재창조 아카데미 및 문화관광루트 개발 : 주민ㆍ상인ㆍ시민 아카데미

□ 투자심사 결과

○ 조건부

○ 중기재정계획 반영 및 국비 확보 후 추진

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,926백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2016	2017	2018	2019	2020 이후
계	5,926	408	550	2,730	180	1,704	354
국 비	2,963	204	274	1,366	90	852	177
시 비	1,172	102	138	682	45	205
구 비	1,791	102	138	682	45	647	177
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

※ 특별교부세, 특별교부금은 구비로 포함

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 94%)

○ 2015.  5월 ~ 2015. 12월 : 기본계획 및 실시설계 용역완료

○ 2016.  4월 : 좌수영 이야기길 및 동문거리길 공사 발주

○ 2016.  5월 : 공사착공(1차), 의용단길, 동문거리길 조성 완료

○ 2017.  4월 : 공사 발주 및 착공(2차)

○ 2017.  6월 : 공사준공(1차), 관아거리길 및 남문거리길, 중영거리길 조성 완료

○ 2017. 12월 : 공사준공(2차), 수영팔도장터길 및 선소거리길 조성 완료

○ 2018.  2월 : 도시활력증진지역 개발사업 계획변경 승인(국토교통부)

○ 2018.  5월 : 공사(3차) 디자인개발 및 실시설계용역 착수

○ 2018. 10월 : 공사(3차) 디자인개발 및 실시설계용역 준공

○ 2018. 12월 : 공사(3차) 발주 및 착공

○ 2019. 12월 : 공사(3차) 준공

○ 2019. 12월 : 미디어글라스 설치공사 착공

□ 향후계획

○ 2020. 2월 : 미디어글라스 설치공사 준공 및 사업완료

사업명

수영구 공공도서관 재건축사업

담당자

문화관광과 김재경(☎610-4064)

□ 사업목적 및 필요성

○ 이용자들의 정보 욕구 및 도서관 이용 수요 증가에 따른 맞춤형 도서관       시설 확충 필요에 따라, 기존 도서관을 재건립하여 주민의 수준 높은         지식문화 인프라를 구축하고 문화적 다양성이 공존하는 지역사회의 거점        도서관으로 만들고자 함

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017년 3월 ∼ 2020년 하반기

○ 위    치 : 부산광역시 수영구 남천서로 33 외 2필지

○ 규    모 : 대지면적 6,604㎡, 연면적 4,100㎡ 이상, 지하1층/지상4층

○ 총사업비 : 197.12억원

□ 투자심사 결과 : 조건부 승인

○ 건립 후 유지관리 비용 최소화를 위해 제로 에너지 건축물 추진

○ 열람과 학습이 가능하도록 자료실내 열람공간 등 시설 활용도를 높일 수       있도록 구성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,712백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2016	2017	2018	2019	2020 이후
계	19,712	4,803	0	0	89	663	14,157
국 비	5,388				64	662	4,662
시 비	4,041				2	1	4,038
구 비	10,283	4,803			23		5,457
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

※ 특별교부세, 특별교부금은 구비로 포함

□ 추진상황(설계용역 완료, 공정율 20%)

○ 2016. 12. : 수영구도서관 재건립 기본계획 수립

○ 2017.  3. : 중앙 투자심사 조건부 승인, 공유재산관리계획 승인

○ 2018.  6. : 설계공모

○ 2018. 11. : 설계용역 착수

○ 2019. 12. : 설계용역 완료

□ 향후계획

○ 2020.  1.    : 착공

○ 2021. 하반기 : 준공 및 개관

□ 사업변경 내역

○ 수영구 도서관 재건립 기본계획 변경에 의거 총사업비 증액(2017.4.28.)

▷ 중앙 투자심사 결과 제로에너지 건축물 추진에 의한 사업비 증액

(당초) 15,928백만원 ⇒ (변경) 19,712백만원

○ 설계용역 완료에 따른 연면적 변경(2019.12.6.)

(당초) 연면적 4,100㎡ ⇒ (변경) 연면적 4,290㎡

사업명

수영구 도서관 광안분관 건립사업

담당자

문화관광과 박채령(☎610-4065)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도서관의 위치가 남천1동과 망미1동에 소재하여 정보문화 기반시설의       권역별 균형적인 성장이 요구됨

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2020년

○ 위 치 : 부산광역시 수영구 광안동 1148-3번지

○ 규 모 : 대지면적 700㎡, 연면적 902.26㎡ 이상, 지하1층/지상3층

□ 투자심사 결과

○ 적정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,869백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2016	2017	2018	2019	2020 이후
계	3,869	469	0	0	0	112	3,288
국 비	1,120					112	1,008
시 비	840						840
구 비	1,440						1,440
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	469	469

※ 특별교부세, 특별교부금은 구비로 포함

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 30%)

○ ‘17.  1. : 광안분관 신축계획 수립

○ ‘17.  3. : 공유재산관리계획 및 지방재정투자심사 승인

○ ‘17.  4. : 문화체육관광부 공공도서관 건립지원 사전평가 결과 적정

○ ‘18.  9. : 설계용역비 편성(2회추경, 153백만원)

○ ‘19.  7. : 설계용역 착수계 제출

○ ‘19. 10. : 수영구청 경관심의 요청

○ ‘19. 11. : 건축협의 접수

○ ‘19. 11. : 설계용역 최종보고회 개최

○ ‘19. 12. : 설계용역 최종납품(설계용역 준공)

○ ‘19. 12. : 건축공사 및 공종별 공사발주 및 계약

□ 향후계획

○ ‘20.  1. : 공사착공

○ ‘20. 11. : 공사준공

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

호암골 노외공영주차장 건립

담당자

교통행정과 이미영(☎610-4552)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주거환경이 열악하고 주거밀집지역 주차난 해소를 위해 공영주차장 건립

○ 주택가 불법주차로 인한 긴급차량 진입 애로 사항 해결하여 안전사고 예방

□ 사업개요

○ 기    간 : 2018년 ~ 2020년

○ 위    치 : 부산광역시 수영구 광안4동 1146번지 일원(호암로 75)

○ 규    모 : 주차면 130면(철골조 3층 4단, 지형활용)

○ 총사업비 : 5,800백만원

□ 투자심사 결과 : 적정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2016	2017	2018	2019	2020 이후
계	5,800	0	0	0	0	124	5,676
국 비	2,900					124	2,776
시 비	1,160						1,160
구 비	1,740						1,740
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

※ 특별교부세, 특별교부금은 구비로 포함

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 10%)

○ 2018. 9.  : 소규모 공영주차장 건설을 위한 사전 조성 부지 매입(2필지)

○ 2018. 11. : 중기지방재정계획 및 지방재정투자사업 심사(가결)

○ 2019. 10. : 도시계획시설 결정, 기본 및 실시설계 용역(6개월)

□ 향후계획

○ 2020.  5. : 공사 착공 전 사전절차 이행

○ 2020.  6. : 공사 착공

○ 2020. 12. : 공사 준공

○ 2020. 12. : 주차장 운영(관리위탁)

사업명

광안리어방축제

담당자

문화관광과 김정선(☎610-4062)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 유일 전통어촌마을의 민속문화를 주제로 지역 전통문화의 계승․보존․전파

○ 주민, 단체, 기업체의 참여확대를 통한 일자리 창출 및 지역민 대화합

○ 천혜의 관광자원 바다와 연계한 관광활성화 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기   간 : 2020. 4. 24.(금) ~ 4. 26.(일)  ▶ 3일간

○ 위   치 : 광안리해수욕장 일원

○ 규   모 : 뮤지컬어방, 경상좌수사행렬 등 39개 프로그램

□ 투자심사 결과 : 조건부

○ 이전 사례 성과분석을 통한 구체적 행사계획을 수림

○ 민자(후원 등) 유치 등 재원 다각화 검토

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 2020년 총사업비 : 803백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2016	2017	2018	2019	2020 이후
계	2,901	0	459	489	550	600	803
국 비	306		84	84	80		58
시 비	295		45	45	65	95	45
구 비	2,300		330	360	405	505	700
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

※ 특별교부세, 특별교부금은 구비로 포함

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 10%)

○ 2019. 12월 일반행사 및 어방민속마을 조성 행사대행사 선정

□ 향후계획

○ 2020. 1월 : 예산집행․홍보계획 수립, 프로그램 선정 및 공연 기획

○ 2020. 2월 : 설명회(추진위, 구), 기본계획 확정ㆍ부서시달, 홍보물 디자인 확정

○ 2020. 3월 : 홍보물 제작ㆍ배포, 유관기관(단체) 업무협의, 추진상황 보고회

○ 2020. 4월 : 홍보물 설치, 시설물 배치, 최종 보고회, 행사실행, 집중 홍보

○ 2020. 5~6월 : 축제평가ㆍ정리, 기획사 등 축제관계자 프로그램별 자체평가 회의

□ 사업변경 내역

○ 2020~2021년 문화관광축제 선정에 따른 국비 추가 확보 : 58백만원

사업명

민안초등학교 다목적강당 증축

지원사업

담당자

창조도시교육추진단 권연경

(☎610-4129)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다양한 교육과정 운영 및 학교행사를 진행, 학생들의 체력 증진과 인성 발달에 기여

○ 개방형 다목적강당 건립으로 지역주민들의 생활체육 활성화와 건강           증진에 기여, 문화센터로서의 역할 수행

□ 사업개요 ☞ 투자심사내역

○ 기   간 : 2020년 1월 ∼ 2021년 2월

○ 위   치 : 부산광역시 수영구 감포로38번길 33(민락동)

○ 규   모 : 지상 5층(기존 4층→1개층 증축), 연면적 690㎡

□ 투자심사 결과

○ 적정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,357백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2016	2017	2018	2019	2020 이후
계	2,357	0	0	0	0	0	2,357
국 비	0
시 비	118						118
구 비	118						118
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	2,121						2,121 교육부특교금

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 0%)

○ 2019. 5월 : 다목적강당 건립 신청(해당학교 → 해운대교육지원청)

○ 2019. 5월 : 구비 지원여부 검토 요청(해운대교육지원청 → 區)

○ 2019. 5월 : 구비 지원가능 검토 회신(區 → 해운대교육지원청)

○ 2019. 5월 : 다목적강당 건립 신청(해운대교육지원청 → 교육청 → 부산시)

○ 2019.10월 : 수영구 교육경비보조금심의위원회 심의

○ 2019.11월 : 부산시 지원 대상 학교 선정·통보

○ 2019.11월 : 수영구 중기지방재정계획 제출‧반영

○ 2019.11월 : 수영구 재정계획심의위원회 심의

□ 향후계획

○ 2020. 1월 : 해운대교육지원청으로 구 보조금 전출

○ 2020. 1월 : 설계용역 착수

○ 2020. 2월 : 설계용역 발주

○ 2020. 6월 : 설계용역 완료

○ 2020. 7월 : 공사 발주

○ 2020. 8월 : 공사 착공

○ 2021. 2월 : 공사 준공

사업명

기부금 활용 민간어린이집 매입 사업

담당자

가복행복과 김혜윤(☎610-4322)

□ 사업목적 및 필요성

○ 민간재원(부산도시공사) 기부금으로 민간어린이집 매입하여 지역 균형 및 민간        상생 발전 도모

○ 장애아통합반, 휴일보육서비스를 운영하여 발달지연경계 및 긴급·일시보육이        필요한 영유아에게 맞춤형 보육서비스 제공하여 안심하고 아이키우기         좋은 보육환경 조성

□ 사업개요 ☞ 투자심사내역

○ 기   간 : 2019. 9월 ~ 2020. 7월

○ 위   치 : 부산광역시 수영구 광안로35번길 9(광안동)

○ 규   모 : 부지 433㎡, 연면적 726.84㎡(2개동, 지상4층)

□ 투자심사 결과 : 조건부 승인

○ 2020 ~ 2024 중기지방재정계획에 반영하는 조건부 추진으로 의결

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,422백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2016	2017	2018	2019	2020 이후
계	2,422	0	0	0	0	210	2,212
국 비	161						161
시 비	81						81
구 비	80						80
지 방 채	0
민간자본	2,100					210	1,890
기 타	0

※ 특별교부세, 특별교부금은 구비로 포함

□ 추진상황(추진단계 및 공정율  20%)

○ 2019.  9월 : 기부금을 통한 국공립어린이집 신설·운영 추진계획 수립

○ 2019. 11월 : 지방재정 투자사업 심사, 공유재산 관리계획 심의

□ 향후계획

○ 2020.  1월 : 어린이집 리모델링 공사 설계 및 용역

○ 2020.  2월 : 리모델링 건축공사 착공

○ 2020.  3월 : 어린이집 개원

○ 2020.  7월 : 리모델링 소방공사 착공 및 완료

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 2,220백만원 → 2,422백만원 변경

▷ 스프링클러 등 소방공사 추가로 사업비 증가