		2021년 수영구 재정공시

109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 수영구에서 ‘20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년이후
응답하라 수영팔도이야기 (좌수영성 재창조 사업)	5,926	5,572	354	-	2020	2014	완료
광안리어방축제	2,392	2,174	218	-	매년 추진	2019	완료
기부금 활용 민간어린이집 매입 사업	2,422	210	2,212	-	2020	2019	완료
2021 카운트다운부산	140	40	100	-	매년 추진	2020	완료
수영구 공공도서관 재건축 사업	19,712	5,555	3,185	10,972	2021	2017	67
수영구 도서관 광안분관 건립사업	4,128	581	979	2,568	2021	2017	100
호암골 노외공영주차장건립	5,800	62	640	5,098	2021	2018	20
민안초등학교 다목적 강당 증축지원사업	2,357	-	-	2,357	2021	2019	80
광안리일원 문화관광형 스마트타운조성	2,250	-	1,408	842	2021	2020	20
수영경찰서 진입도로확장공사	2,000	-	-	2,000	2022	2020	5
광안3동 복합동사 건립	3,800	600	28	3,172	2022	2020	16.5
2020 수영구 드론라이트쇼	100	-	-	100	2021	2020	0
수영구 복지하나로 센터 건립	11,603	-	-	11,603	2023	2020	0
호암초등학교 다목적강당 건립지원	2,365	-	-	2,365	2022	2020	0
수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립	2,969	-	-	2,969	2021	2020	0

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2020년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황(붙임6)

10-2. 지방채 발행사업

우리 수영구는 해당사항이 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 수영구는 해당사항이 없습니다.

〚 붙임6 〛 10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

응답하라! 수영팔도 이야기

(좌수영성 일원 재창조 사업)

담당자

스마트도시과 염승철 (☎610-4891)

□ 사업목적

○ 수영의 역사적자원(수영사적공원, 좌수영성지)과 우수한 지역자원(수영강,          팔도시장)을 연계하여 지역적 특성이 반영된 장소로 재창조 경제·사회·환경적인        역할을 동시에 수행 할 수 있는 거점 공간 조성

○ 지역의 풍부한 문화·예술·역사자원을 산업화하고 관광상품 개발을 통한       지역경제 활성화 유도로 체계적이고 창조적인 거버넌스 모델 구축

○ 수영강~팔도시장~수영사적공원 간 연계사업을 통해 단절된 보행공간을 회복하여       주민이 주체가 되는 참여형 장소로 재창조 기틀 마련

□ 사업개요 ☞ 투자심사내역

○ 기 간 : 2015년 ~ 2018년

○ 위 치 : 부산광역시 수영구 수영동 수영사적공원, 팔도시장 일원

○ 규 모 :◽ 좌수영성 이야기길 조성(L=575m, B=6~8m), 동문거리길조성(L=160m, B=6m)

◽선소거리길 조성(L=212m, B=6~8m), 수영팔도장터길 조성(L=106m, B=6~8m)

◽수영재창조 아카데미 및 문화관광루트 개발 : 주민ㆍ상인ㆍ시민 아카데미

◽수영·망미지구 및 수영강변 야간경관조성

□ 투자심사 결과

○ 조건부

○ 중기재정계획 반영 및 국비 확보 후 추진

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,926백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액
		기투자	2016	2017	2018	2019	2020
계	5,926	408	550	2,730	180	1,704	354
국 비	2,963	204	274	1,366	90	852	177
시 비	1,172	102	138	682	45	205	0
구 비	1,791	102	138	682	45	647	177
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 100%)

○ 2015.  5월 ~ 2015. 12월 : 기본계획 및 실시설계 용역완료

○ 2016.  4월 : 좌수영 이야기길 및 동문거리길 공사 발주

○ 2016.  5월 : 공사착공(1차), 의용단길, 동문거리길 조성 완료

○ 2017.  4월 : 공사 발주 및 착공(2차)

○ 2017.  6월 : 공사준공(1차), 관아거리길 및 남문거리길, 중영거리길 조성 완료

○ 2017. 12월 : 공사준공(2차), 수영팔도장터길 및 선소거리길 조성 완료

○ 2018.  2월 : 도시활력증진지역 개발사업 계획변경 승인(국토교통부)

○ 2018.  5월 : 공사(3차) 디자인개발 및 실시설계용역 착수

○ 2018. 10월 : 공사(3차) 디자인개발 및 실시설계용역 준공

○ 2018. 12월 : 공사(3차) 발주 및 착공

○ 2019. 12월 : 공사(3차) 준공

○ 2019. 12월 : 미디어글라스 설치공사 착공

○ 2020.  3월 :  미디어글라스 설치공사 준공 및 사업완료

□ 향후계획

○ 사업구간 내 도로 및 시설물에 대한 효율적인 관리

⇒ 지속적인 모니터링을 통한 시설물 보완 및 유지보수

사업명

광안리어방축제

담당자

문화관광과 백승진(☎610-4062)

□ 사업목적

○ 전국 유일 전통어촌마을의 민속문화를 주제로 지역 전통문화의 계승․보존․전파

○ 주민, 단체, 기업체의 참여확대를 통한 일자리 창출 및 지역민 대화합

○ 천혜의 관광자원 바다와 연계한 관광활성화 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요 ☞ 투자심사내역

○ 기 간 : 2020. 4. 24.(금) ~ 4. 26.(일)

○ 위 치 : 광안리해수욕장 일원

○ 규 모 : 5개분야 35개 프로그램

□ 투자심사 결과 : 조건부

○ 이전 사례 성과분석을 통한 구체적 행사계획을 수립

○ 민자(후원 등) 유치 등 재원 다각화 검토

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액
		기투자	2016	2017	2018	2019	2020
계	2,316	0	459	489	550	600	218
국 비	357	0	84	84	80	0	109
시 비	250	0	45	45	65	95	0
구 비	1,709	0	330	360	405	505	109
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진내역

○ 축제홍보 및 경쟁력강화 사업 추진

구분	사 업 명	주요내용
홍보	어방을 그리다	150여개의 조각그림을 대형그림으로 완성
	어방마스크	축제캐릭터 활용 천마스크 제작
	어방꾸러미	집에서즐기는 축제꾸러미 제작
	축제포토존 조성	광안리해변 축제를 기억하는 포토존 전시
	축제캐릭터FRP	수대장,어서방 FRP 제작 전시
	포토존 NPC 운영	축제포토존 안전운영 및 축제홍보
	축제영상제작,홍보	어방을그리다, 축제즐기는영상, 스팟광고, 홍보물
경쟁력 강화	축제발전전략 용역	축제현황 및 수요자분석, 성과평가, 발전방안수립
	축제물품 구비 등	경상좌수사행렬 의상 및 물품구입, 기타시설제작

□ 사업변경 내역

○ 코로나19로 축제 취소되어 축제 홍보 및 경쟁력강화 사업 시행

- 문화체육관광부 보조금 지침 변경[문체부 국내관광진흥과-3033(2020.8.11.)]

사업명

기부금 활용 민간어린이집 매입 사업

담당자

가족행복과 배근남(☎610-4322)

□ 사업목적

○ 민간재원(부산도시공사) 기부금으로 민간어린이집을 매입하여 지역 균형 및 민간 상생 발전 도모

○ 장애아통합반, 휴일보육 서비스를 운영하여 발달지연 경계 및 긴급·일시보육이 필요한 영유아에게 맞춤형 보육서비스를 제공하여 안심하고 아이키우기 좋은 보육환경 조성

□ 사업개요 ☞ 투자심사내역

○ 기 간 : 2019. 9월 ~ 2020. 7월

○ 위 치 : 부산광역시 수영구 광안로35번길 9(광안동)

○ 규 모 : 부지 433㎡, 연면적 726.84㎡(2개동, 지상4층)

□ 투자심사 결과

○ 조건부

○ 2020 ~ 2024 중기지방재정계획에 반영하는 조건부

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,422백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액
		기투자	2016	2017	2018	2019	2020
계	2,422	0	0	0	0	210	2,212
국 비	161	0	0	0	0	0	161
시 비	80	0	0	0	0	0	80
구 비	152	0	0	0	0	0	152
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	2,029	0	0	0	0	210	1819
기 타	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진내역

○ 2019. 9월 : 기부금 활용 국공립어린이집 신설·운영 추진계획 수립

○ 2019.10월 : 민간어린이집 매입을 통한 국공립 확충 협약 체결

☞ 부산시 ↔ 부산도시공사 ↔ 수영구청

○ 2019.11월 : 지방재정 투자사업 심사, 공유재산 관리계획 심의

○ 2019.12월 : 부동산 매매계약 체결

○ 2020. 1월 : 공립 어린이집 위탁 계약 체결

○ 2020. 2월 : 리모델링 공사(건축·전기·소방·통신) 계획 수립

○ 2020. 3월 : 공립 수아&영이 어린이집 개원(3.1.)

☞ 리모델링 공사 기간 중 수영구 육아종합지원센터 활용

○ 2020. 3. ~ 12월 : 리모델링 공사 착공·시행 및 완료

□ 사업변경 내역

○ 당초, 매입지 본관(A동)과 별관(B동) 모두 리모델링 후 공립 어린이집으로 활용할 예정이었으나,

○ 별관(B동) 시설이 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」제9조의 3에 의거 편의시설 설치 기준에 부적합하여, 노유자시설로 용도변경이 불가함에 따라 별관(B동) 전체를 다함께돌봄센터로 활용하기로 결정

사업명

2021 카운트다운 부산

담당자

문화관광과 백승진(☎610-4062)

□ 사업목적

○ 부산의 랜드마크인 광안대교를 활용한 미디어파사드, 불꽃쇼 등의        광안리해변 카운트다운 행사를 개최하여 세계적인 관광명소로 발전

○ 연말 시즌 이슈를 반영한 함께 즐기면서 부산만의 콘텐츠가 있는 겨울        관광상품으로 개발

□ 사업개요 ☞ 투자심사내역

○ 기 간 : 2020. 12. 31.(목) ~ 2021. 1. 1.(금)

○ 위 치 : 광안리해수욕장 일원

○ 규 모 : 뮤직콘서트, 카운트다운 퍼포먼스 등

□ 투자심사 결과 : 조건부

○ 중기지방재정계획에 반영하는 조건

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액
		기투자	2016	2017	2018	2019	2020
계	140	0	0	0	0	40	100
국 비	0	0	0	0	0	0	0
시 비	0	0	0	0	0	0	0
구 비	140	0	0	0	0	40	100
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진내역

○ 개최기간 : 2020. 12. 31.(목) 23:00 ~ 2021. 1. 1.(금) 00:10

○ 장    소 : 수영구 관내 관광지 및 KNN 스튜디오

※ 연말연시 특별방역 대책으로 녹화장 수영구생활문화센터에서 KNN 스튜디오로 변경

○ 주    제 : 오고 싶은 부산, 찾고 싶은 광안리

○ 진행방법 : 온라인 실시간 중계(1theK, 캐내네) 및 TV 방송(KNN)

- 온라인 조회수 : 총 7.6만 [현장중계(3.2만), 녹화영상(4.4만)] 2020.1.4.기준

○ 행사내용

▷ 사전녹화 : 수영구 관광지 홍보 사전촬영 및 공연

① 더보이즈 : 민락수변공원 공연(2곡), 광안리(빵천동, 활어회홍보)

② 알리 : 금련산, 수영사적공원, 비콘그라운드, SUP, 민락항 등 공연(2곡)

▷ 본행사 : 랜선스튜디오 공연 및 토크

- 출연 : 정은지, 듀에토, 정세운, 빅톤

▷ 카운트다운 퍼포먼스 : 광안대교 배경 카운트다운 CG 연출

□ 사업변경 내역

○ 코로나19 및 연말연시 특별방역 대책으로 사업내용 변경

- 장소 : 광안리해변 ▷ KNN 스튜디오

- 내용 : K-POP콘서트, 카운트다운 퍼포먼스(미디어파사드,레이저쇼)

▷ K-POP 온라인콘서트, 수영구 홍보영상제작(2작품)

사업명

수영구 공공도서관 재건축사업

담당자

평생교육과 박채령(☎610-4514)

□ 사업목적 및 필요성

○ 이용자들의 정보 욕구 및 도서관 이용 수요 증가에 따른 맞춤형 도서관       시설 확충 필요에 따라, 기존 도서관을 재건립하여 주민의 수준 높은         지식문화 인프라를 구축하고 문화적 다양성이 공존하는 지역사회의 거점        도서관으로 만들고자 함

□ 사업개요 ☞ 투자심사내역

○ 기    간 : 2017년 3월 ∼ 2021년 하반기

○ 위    치 : 부산광역시 수영구 남천서로 33 외 2필지

○ 규    모 : 대지면적 6,604㎡, 연면적 4,100㎡ 이상, 지하1층/지상4층

□ 투자심사 결과 : 조건부 승인

○ 건립 후 유지관리 비용 최소화를 위해 제로 에너지 건축물 추진

○ 열람과 학습이 가능하도록 자료실내 열람공간 등 시설 활용도를 높일 수       있도록 구성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,712백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2017	2018	2019	2020	2021 이후
계	19,712	4,803	0	89	663	3,185	10,972
국 비	5,388	0	0	64	662	2,212	2,450
시 비	4,041	0	0	2	1	347	3,691
구 비	10,283	4,803	0	23		626	4,831
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진상황(설계용역 완료, 공정율 67%)

○ 2016. 12. : 수영구도서관 재건립 기본계획 수립

○ 2017.  3. : 중앙 투자심사 조건부 승인, 공유재산관리계획 승인

○ 2018.  6. : 설계공모

○ 2018. 11. : 설계용역 착수

○ 2019. 12. : 설계용역 완료

○ 2020.  1. : 착공

□ 향후계획

○ 2021. 10. : 준공

○ 2022.  3. : 개관

□ 사업변경 내역

○ 수영구 도서관 재건립 기본계획 변경에 의거 총사업비 증액(2017.4.28.)

▷ 중앙 투자심사 결과 제로에너지 건축물 추진에 의한 사업비 증액

(당초) 15,928백만원 ⇒ (변경) 19,712백만원

○ 설계용역 완료에 따른 연면적 변경(2019.12.6.)

(당초) 연면적 4,100㎡ ⇒ (변경) 연면적 4,290㎡

사업명

수영구 도서관 광안분관 건립사업

담당자

평생교육과 박채령(☎610-4514)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도서관의 위치가 남천1동과 망미1동에 소재하여 정보문화 기반시설의       권역별 균형적인 성장이 요구됨

□ 사업개요 ☞ 투자심사내역

○ 기 간 : 2018년 ~ 2021년

○ 위 치 : 부산광역시 수영구 광안동 1148-3번지

○ 규 모 : 대지면적 700㎡, 연면적 952.54㎡ 이상, 지하1층/지상3층

□ 투자심사 결과

○ 적정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,128백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2017	2018	2019	2020	2021 이후
계	4,128	469	0	0	112	979	2,568
국 비	1,120	0	0	0	112	115	893
시 비	840	0	0	0	0	209	631
구 비	1,699	0	0	0	0	655	1,044
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	469	469	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 100%)

○ ‘17.  1. : 광안분관 신축계획 수립

○ ‘17.  3. : 공유재산관리계획 및 지방재정투자심사 승인

○ ‘17.  4. : 문화체육관광부 공공도서관 건립지원 사전평가 결과 적정

○ ‘18.  9. : 설계용역비 편성(2회추경, 153백만원)

○ ‘19.  7. : 설계용역 착수계 제출

○ ‘19. 10. : 수영구청 경관심의 요청

○ ‘19. 11. : 건축협의 접수

○ ‘19. 11. : 설계용역 최종보고회 개최

○ ‘19. 12. : 설계용역 최종납품(설계용역 준공)

○ ‘19. 12. : 건축공사 및 공종별 공사발주 및 계약

○ ‘20.  1. : 공사착공

○ ‘20.  4. : 광안도서관 건립 사업계획 변경 검토 보고

○ ‘20.  5. : 광안 어린이도서관 건립사업 설계용역 의뢰 ☞ 5.26. 착수

○ ‘20.  7. : 광안 어린이도서관 건립사업 설계용역 준공

○ ‘20.  8. : 광안 어린이도서관 설계변경내역 제출(시공사)

○ ‘20.  8. : 공종별 계약변경 완료, 공사재개

○ ‘21.  6. : 개관

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

호암골 노외공영주차장 건립

담당자

교통행정과 윤미희(☎610-4552)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고지대 주택밀집지역 이면도로 주차난 해소 및 도로기능 회복

○ 긴급차량 통행로 확보를 통한 안전한 마을 조성

□ 사업개요 ☞ 투자심사내역

○ 기  간 : 2018년 ~ 2020년

○ 위  치 : 부산광역시 수영구 광안4동 1146번지 일원

○ 규  모 : 철골조 공영주차장 조성

○ 사업비 : 5,800백만원

□ 투자심사 결과 : 적정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획
		기투자	2018	2019	2020	2021 이후
계	5,800	0	0	62	640	5,098
국 비	2,900	0	0	62	629	2,209
시 비	1,160	0	0	0	0	1,160
구 비	1,740	0	0	0	11	1,729
지 방 채	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 30%)

○ '18. 9. 소규모 공영주차장 건설을 위한 사전 조성 부지 매입(2필지)

○ '18.11. 중기지방재정계획 및 지방재정투자사업 심사

○ '18.12. 2019년 주차환경개선지원(균특) 사업 확정

○ '19.10. ~ '20.11. 실시설계용역('19.10.31.~'20.11.16.)

○ '20. 5. 경관심의

○ '20. 6. 시유지 매입(광안동 1170-21, 132㎡)

○ '20. 8. 시 계약심사

○ '20.10. ~ 11. 공작물 축조신고

○ '20.12. 공사 착공

○ '21.  3. : 철거완료

○ '21.  3. ~ 5. : 가시설공사

○ '21.  6. ~ 7. : 지장물 이설, 기초공사

□ 향후계획

○ '21. 10. 공사 준공

○ '22. 01. 주차장 운영

□ 사업변경 내역

구 분	변경전	변경후
사업기간	2018~2020년	2018~2021년
위 치	광안4동 1146번지 외 7필지	광안4동 1146번지 외 5필지
대지면적	1,800㎡	1,046.87㎡
연 면 적	3,825㎡	982.35㎡
주 차 면	130면	54면
구 조	철골조 3층4단	철골조 2개동(1층2단/2층3단)

사업명

민안초등학교 다목적강당

증축 지원사업

담당자

평생교육과 제지영(☎610-3932)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다양한 교육과정 운영 및 학교행사를 진행, 학생들의 체력 증진과 인성 발달에 기여

○ 개방형 다목적강당 건립으로 지역주민들의 생활체육 활성화와 건강            증진에 기여, 문화센터로서의 역할 수행

□ 사업개요 ☞ 투자심사내역

○ 기 간 : 2020년  1월 ~ 2021년  7월

○ 위 치 : 부산광역시 수영구 감포로38번길 33(민락동, 민안초등학교)

○ 규 모 : 기존 4층→1개층 증축, 연면적 690㎡

□ 투자심사 결과

○ 적정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,357백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2017	2018	2019	2020	2021 이후
계	2,357	0	0	0	0	0	2,357
국 비	0	0	0	0	0	0	0
시 비	118	0	0	0	0	0	118
구 비	118	0	0	0	0	0	118
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	2,121	0	0	0	0	0	2,121 교육부특교금

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 80%)

○ 2019. 5월 : 다목적강당 건립 신청(해당학교 → 해운대교육지원청)

○ 2019. 5월 : 구비 지원여부 검토 요청(해운대교육지원청 → 區)

○ 2019. 5월 : 구비 지원가능 검토 회신(區 → 해운대교육지원청)

○ 2019. 5월 : 다목적강당 건립 신청(해운대교육지원청 → 교육청 → 부산시)

○ 2019.10월 : 수영구 교육경비보조금심의위원회 심의

○ 2019.11월 : 부산시 지원 대상 학교 선정·통보

○ 2020. 2월 : 다목적강당 건립 지원 보조금 전출(區 → 해운대교육지원청)

○ 2020. 4월 : 설계용역 착수

○ 2020.10월 : 설계용역 완료

○ 2020.12월 : 공사 발주

○ 2021. 1월 : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2021. 8월 : 공사 준공

사업명

광안리 일원 문화관광형 스마트타운 조성사업

담당자

스마트도시과 김정선(☎610-4882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 광안리해수욕장은 부산을 대표하는 도심형 해수욕장이지만 해변침식으로       인한 모래사장의 감소와 관광객의 욕구 다변화로 전통적 해수욕장의 기능이       약화되는 추세임

○ 좁은 도로폭에 따른 무단횡단, 주차장 부족등의 여러 가지 문제점 존재

○ 스마트기술을 적용하여 도시에서 일어나는 문제를 해결하고, 관광콘텐츠를       강화하여 지역경쟁력을 확보하기 위해 광안리 일원 문화관광형 스마트타운을       조성하고자 함

□ 사업개요  ☞ 투자심사내역

○ 기 간 : 2020년 3월 ∼ 2020년12월

○ 위 치 : 부산광역시 수영구 민락동192-20번지 일원

○ 규 모 : 민락동192-20번지 일원 1,242㎢ 내 스마트타운 조성

○ 내 용

- 기반구축사업 : 플랫폼 구축, 유동인구 분석

- 관광콘텐츠 : 스마트미디어월, AR기반 모바일 서비스

- 관광편의 : 스마트주차정보, 스마트벤치, 스마트횡단보도

□ 투자심사 결과

○ 적정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2017	2018	2019	2020	2021 이후
계	2,250	0	0	0	0	1,408	842
국 비	1,000	0	0	0	0	1,000	0
시 비	0	0	0	0	0	0	0
구 비	1,250	0	0	0	0	408	842
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 20%)

○ 스마트타운 챌린지 본사업 공모 선정(국비10억원) : 20. 2.

○ 사업관리 용역 발주 : 20. 5

○ 정보화 사업 사전절차 등 : 20. 8.~20.10.

○ 조성 사업 발주 : 20.10.

○ 업체 선정 및 사업 착수 : 20.12.

□ 향후계획

○ 스마트타운 조성 사업 완료 : 21. 6.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

수영경찰서 진입도로 확장공사

담당자

건설과 박상준(☎610-4712)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신축하는 수영경찰서의 교통 수요 증가를 고려, 원활한 진・출입을 위하여 수미로와 연결하는 진입도로(B=6→12m, L=45m) 확장, 교통환경 개선으로 방문객과 인근 주민의 교통편의 제공

□ 사업개요 ☞ 투자심사내역

○ 기 간 : 2020년 6월 ~ 2021년 12월

○ 위 치 : 수영동 463-3번지 일원

○ 규 모 : 도로확장 B=6→12m, L=45m

□ 투자심사 결과

○ 적정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2017	2018	2019	2020	2021 이후
계	2,000	0	0	0	0	0	2,000
국 비	0	0	0	0	0	0	0
시 비	0	0	0	0	0	0	0
구 비	2,000	0	0	0	0	0	2,000
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 5 %)

○ 2020. 02. 28. : 제1회 수영구 재정투자심사(적정)

○ 2020. 06. 22. : 특별조정교부금 교부 결정

○ 2020. 07. 10. : 도시관리계획 결정(안) 입안

○ 2020. 09. 16. : 도시관리계획(시설:도로) 결정 및 지형도면 고시

○ 2020. 12. 09. : 2020년 제3회 추가경정예산 배정

○ 2021. 03. 02. : 실시설계용역 착수

○ 2021. 06. 29. : 실시설계용역 준공

□ 향후계획

○ 2021. 08 ~ 2022. 12. : 토지 및 건물 매입, 도로확장 공사 추진

사업명

광안3동 복합동사 건립

담당자

행정지원과 김현희(☎610-4112)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1981년 신축 후 39년이 경과한 노후□협소한 동사의 확충□개선을 통해 생애주기별 평생학습 프로그램과 이용자의 일상적 요구에 밀착된 복합 행정서비스 제공기반 마련

□ 사업개요 ☞ 투자심사내역

○ 기 간 : 2019년 9월 ~ 2021년 12월

○ 위 치 : 부산광역시 수영구 광안동 1069-11

○ 규 모 : 대지면적 403.4㎡, 총면적 1,192.52㎡, 지하1층/지상4층

□ 투자심사 결과

○ 적정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2018	2019	2020	2021	2022 이후
계	3,800	0	0	600	28	3,172	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0
시 비	0	0	0	0	0	0	0
구 비	3,800	0	0	600	28	3,172	0
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진상황(공정율 16.5%)

○ 2019.    9월 : 광안3동 복합동사 건립 기본계획 수립

○ 2019.   11월 : 건립 부지 회계이관 및 취득, 중기재정계획 반영

○ 2020.    4월 : 부산시 지방재정투자사업 심사 ☞ 적정

공공건축 사업계획 사전 검토(공공건축지원센터)

○ 2020.    5월 : 공공건축심의(수영구 건축위원회)

○ 2020.    8월 : 기본 및 실시설계용역 계약심사(부산시 청렴감사담당관)

○ 2020. 9~11월 : 건축설계공모(일반 설계공모) 진행

☞ 4개 작품 응모, 1개 작품 선정(당선작 제출 업체에 설계권 부여)

○ 2021.    1월 : 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수

○ 2021.    7월 : 기본 및 실시설계용역 일시 중지

□ 향후계획

○ 2021. 8월 ~ 2022. 12월 : 실시설계 완료 및 공사 준공, 신 동사 이전 개소

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

2020 수영구 드론라이트쇼

담당자

스마트도시과 이은정(☎610-4884)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기간 지속된 코로나19로 지친 주민들에게 코로나블루 극복 계기 제공

○ 드론라이트쇼 공연을 통해 코로나19로 침체된 지역상권에 활력 부여

□ 사업개요 ☞ 투자심사내역

○ 기 간 : 2020. 12. 24. / 2020. 12. 31.

○ 위 치 : 광안리해변

○ 규 모 : 지상 드론 이착륙구역 100m2

지상 통제 구역(안전구역) 900m2

상공 공연 구간 지상 100m 상공, 5,000m2

1회 공연시 군집드론 수 300대

□ 투자심사 결과 : 적정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2017	2018	2019	2020	2021 이후
계	100	0	0	0	0	0	100
국 비	0	0	0	0	0	0	0
시 비	0	0	0	0	0	0	0
구 비	100	0	0	0	0	0	100
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 0%)

○ 용역계약 체결 완료 : 2020.11.27.

□ 향후계획

○ 코로나19 재확산과 사회적 거리두기 2.5단계 시행에 따라 행사일정 연기

- 사회적 거리두기 단계에 따라 2021. 상반기중 추진

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

수영구 복지하나로센터 건립

담당자

스마트도시과 김정선(☎610-4882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 구청사 노후 및 과밀화로 인한 공간부족 일부 해소

○ 지속적으로 증가하는 행정 및 복지수요에 대한 대비

□ 사업개요 ☞ 투자심사내역

○ 기 간 : 2021년 1월 ∼ 2023년9월

○ 위 치 : 부산광역시 수영구 광안동 735-4

○ 규 모 : 부지면적915.5㎡, 연면적3,296.78㎡, 지하2층·지상4층

○ 내 용 : 수영구청사 별관 건립

□ 투자심사 결과

○ 조건부

▷ 부지 매입 후 추진

▷ 지방자치단체 공유재산 관리기준 준수

▷ 『공유재산 및 물품관리법 시행령』제95조 따른 청사기준 면적준수 및        유사자치단체 신축비용과 비교하여 추진

▷ 공유재산관리계획 수립 및 심의 완료 후 추진

▷ 『건축서비스산업진흥법』개정에(‘19.12.19.)에 따른 공공건축 업무절차에        따라 사업추진

▷ 신축비용 주민공개 이행(부산광역시 공공시설 건립비용 공개에 관한 조례)

▷ 중기지방재정계획 반영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2017	2018	2019	2020	2021 이후
계	11,600	0	0	0	0	0	11,600
국 비	0	0	0	0	0	0	0
시 비	0	0	0	0	0	0	0
구 비	11,600	0	0	0	0	0	11,600
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 0%)

○ 수영구 복지 하나로 센터 건립 계획 수립 : 20. 4.

○ 공유재산 심의회 의결 : 20.10.

○ 지방재정투자심사 : 20.10.

○ 공유재산관리계획 승인 : 20.12.

□ 향후계획

○ 부지(시유지) 매입 : 21. 5.

○ 공공건축심의 등 행정절차 : 21.8.

○ 설계공모 발주 : 21.10.

○ 기본실시설계용역 : 22.1.

○ 공사 발주 : 22. 6.

○ 공사 준공 : 23.12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

호암초등학교 다목적강당 건립 지원

담당자

평생교육과 제지영(☎610-3932)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다양한 교육과정 운영 및 학교행사를 진행, 학생들의 체력 증진과 인성 발달에 기여

○ 개방형 다목적강당 건립으로 지역주민들의 생활체육 활성화와 건강            증진에 기여, 문화센터로서의 역할 수행

□ 사업개요 ☞ 투자심사내역

○ 기 간 : 2021년  1월 ~ 2022년 2월

○ 위 치 : 부산광역시 수영구 호암로 57(광안동, 호암초등학교)

○ 규 모 : 기존 2층→1개층 증축, 연면적 777㎡

□ 투자심사 결과

○ 조건부(중기지방재정계획 반영)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,365백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2017	2018	2019	2020	2021 이후
계	2,365	0	0	0	0	0	2,365
국 비	0	0	0	0	0	0	0
시 비	118	0	0	0	0	0	118
구 비	118	0	0	0	0	0	118
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	2,129	0	0	0	0	0	2,129 교육부특교금

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 0%)

○ 2020. 6월 : 다목적강당 건립 신청(학교 → 해운대교육지원청)

○ 2020. 6월 : 구비 지원여부 검토 요청(해운대교육지원청 → 區)

○ 2020. 6월 : 구비 지원가능 검토 회신(區 → 해운대교육지원청)

○ 2020. 6월 : 다목적강당 건립 신청(해운대교육지원청 → 교육청 → 부산시)

○ 2020. 9월 : 수영구 교육경비보조금심의위원회 심의

○ 2020.11월 : 부산시 지원 대상 학교 선정·통보

○ 2021. 2월 : 다목적강당 건립 지원 보조금 전출(區 → 해운대교육지원청)

○ 2021. 3월 : 설계용역 발주

○ 2021. 6월 : 설계용역 완료

□ 향후계획

○ 2021. 1월 : 다목적강당 건립 지원 보조금 전출(區 → 해운대교육지원청)

○ 2021. 2월 : 설계용역 발주

○ 2021. 6월 : 설계용역 완료

○ 2021. 7월 : 공사 발주

○ 2022. 3월 : 공사 준공

사업명

수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립

담당자

행정지원과 김현리(☎610-4795)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수영구 스포츠문화타운이 2019년 7월부터 개관하여 운영 중이나,

기존 지하주차장이 협소하여, 대기차량이 발생하고 불법 주·정차로

인한 교통장애가 유발되어, 부설주차장 추가 건립을 통해 이용자

및 인근 거주 주민의 불편과 안전사고 발생 우려를 해소하고자 함

□ 사업개요 ☞ 투자심사내역

○ 기 간 : 2020년 9월 ~ 2022년 1월

○ 위 치 : 부산광역시 수영구 광안동 1333번지(수영구 스포츠문화타운)

○ 규 모 : 대지 966.69㎡, 건물 연면적 2,900㎡ (3층 4단 철골조, 104면 내외)

□ 투자심사 결과

○ 2020년 수시 재정투자사업 심사 원안 승인(적정)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,969백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행계획
		기투자	2020	2021	2022	2023	2023 이후
계	2,969	0	0	2,969	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0
시 비	0	0	0	0	0	0	0
구 비	2,969	0	0	2,969	0	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 0%)

○ 2019. 11. 2020 ~ 2024년 수영구 중기지방재정계획 반영

○ 2020. 9. 수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립 기본계획 수립

○ 2020. 10. 2020년 제5차 수영구 공유재산심의회 원안 가결

○ 2020. 11. 2020년 수시 재정투자사업 심사 원안 승인

○ 2020. 12. 2021년도 정기분 부산광역시 수영구 공유재산 관리계획안 원안 가결

○ 2021. 4. 공공건축계획 사전검토 완료

○ 2021. 7. 부산시 계약심사 완료

□ 향후계획

○ 21. 8. ~ 21.12. 설계공모 및 발주

○ 22. 1. ~ 22. 8. 공사발주 및 계약, 착공, 준공