109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 수영구에서 ‘21년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액	사업완료 (예정)연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년 이후
수영구 도서관 광안분관 건립사업	4,022	1,560	2,462	-	2021	2017	100
민안초등학교 다목적 강당 증축 지원사업	2,357	-	2,357	-	2021	2019	100
광안리 일원 문화관광형 스마트타운 조성	2,246	1,408	838	-	2021	2020	100
2020 수영구 드론라이트쇼	97	70	27	-	2021	2020	100
수영구 공공도서관 재건축 사업	19,712	8,740	5,398	5,574	2022	2017	95
호암골 노외 공영주차장 건립	5,800	702	504	4,594	2022	2018	85
광안리어방축제	2,204	1,368	61	775	매년추진	2019	100
수영경찰서 진입도로 확장공사	2,000	-	75	1,925	2022	2020	5
광안3동 복합동사 건립	4,390	526	42	3,822	2022	2020	20
광안리 M 드론라이트쇼	2,600	-	445	2,155	매년추진	2020	35
수영구 복지 하나로센터 건립	16,525	-	2,775	13,750	2025	2020	18
호암초등학교 다목적 강당 건립 지원사업	2,365	-	-	2,365	2022	2020	50
수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립	3,842	-	63	3,779	2022	2020	1.6
민락매립지 공영주차장 입체화 조성사업	8,000	-	-	8,000	2023	2021	0
망미중학교 다목적 강당 건립 지원사업	5,005	-	-	5,005	2023	2021	0
라이프스타일 축제	126	-	-	126	2022	2021	0
도시라이프스타일 살롱	100	-	-	100	2022	2021	0
c-side 프로젝트	140	-	-	140	2022	2021	0
광안리4지구 연안정비 사업	4,440	-	-	4,440	2025	2021	0

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2021년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황(붙임6)

10-2. 지방채 발행사업

우리 수영구는 해당사항이 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 수영구는 해당사항이 없습니다.

〚 붙임6 〛 10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

수영구 도서관 광안분관 건립사업

담당자

평생교육과 박채령(☎610-4015)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도서관의 위치가 남천1동과 망미1동에 소재하여 정보문화 기반시설의       권역별 균형적인 성장이 요구됨

□ 사업개요 ☞ 투자심사내역

○ 기 간 : 2018년 ~ 2021년

○ 위 치 : 부산광역시 수영구 광안동 1148-3번지

○ 규 모 : 대지면적 700㎡, 연면적 952.54㎡ 이상, 지하1층/지상3층

□ 투자심사 결과 : 적정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,022백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액
		기투자	2017	2018	2019	2020	2021
계	4,022	469	0	0	112	979	2,462
국 비	1,117	0	0	0	112	115	890
시 비	868	0	0	0	0	209	659
구 비	1,568	0	0	0	0	655	913
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	469	469	0	0	0	0	0

□ 추진내역(사업완료)

○ ’17.  1. : 광안분관 신축계획 수립

○ ’17.  3. : 공유재산관리계획 및 지방재정투자심사 승인

○ ’17.  4. : 문화체육관광부 공공도서관 건립지원 사전평가 결과 적정

○ ’18.  9. : 설계용역비 편성(2회추경, 153백만원)

○ ’19.  7. : 설계용역 착수계 제출

○ ’19. 10. : 수영구청 경관심의 요청

○ ’19. 11. : 건축협의 접수

○ ’19. 11. : 설계용역 최종보고회 개최

○ ’19. 12. : 설계용역 최종납품(설계용역 준공)

○ ’19. 12. : 건축공사 및 공종별 공사발주 및 계약

○ ’20.  1. : 공사착공

○ ’20.  4. : 광안도서관 건립 사업계획 변경 검토 보고

○ ’20.  5. : 광안 어린이도서관 건립사업 설계용역 의뢰 ☞ 5.26. 착수

○ ’20.  7. : 광안 어린이도서관 건립사업 설계용역 준공

○ ’20.  8. : 광안 어린이도서관 설계변경내역 제출(시공사)

○ ’20.  8. : 공종별 계약변경 완료, 공사재개

○ ’21.  6. : 개관

□ 사업변경 내역

○ 광안어린이도서관 건립으로의 사업계획 변경

○ 변경사유

▷ 주변 신규아파트 입주로 영유아 가족세대의 유입이 많아져 가족이 함께         이용할 수 있는 어린이서비스에 대한 수요 증가

▷ 교육문화시설 인프라 조성으로 저출산시대 영유아 가족복지, 가족문화    활성화에 부응

사업명

민안초등학교 다목적강당 증축 지원사업

담당자

평생교육과 제지영(☎610-3932)

□ 사업목적

○ 다양한 교육과정 운영 및 학교행사를 진행, 학생들의 체력 증진과 인성 발달에 기여

○ 개방형 다목적강당 건립으로 지역주민들의 생활체육 활성화와 건강            증진에 기여, 문화센터로서의 역할 수행

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 1월 ~ 2021년 8월

○ 위 치 : 민안초등학교(부산광역시 수영구 감포로38번길 33)

○ 규 모 : 지상 5층(기존 4층→1개층 증축), 연면적 690㎡

□ 투자심사 결과 : 적정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,357백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2017	2018	2019	2020	2021 이후
계	2,357	0	0	0	0	0	2,357
국 비	0	0	0	0	0	0	0
시 비	118	0	0	0	0	0	118
구 비	118	0	0	0	0	0	118
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	2,121	0	0	0	0	0	2,121 교육부특교금

□ 추진내역(사업완료)

○ 2019. 5월 : 다목적강당 건립 신청(해당학교 → 해운대교육지원청)

○ 2019. 5월 : 구비 지원여부 검토 요청(해운대교육지원청 → 區)

○ 2019. 5월 : 구비 지원가능 검토 회신(區 → 해운대교육지원청)

○ 2019. 5월 : 다목적강당 건립 신청(해운대교육지원청 → 교육청 → 부산시)

○ 2019.10월 : 수영구 교육경비보조금심의위원회 심의

○ 2019.11월 : 부산시 지원 대상 학교 선정·통보

○ 2020. 2월 : 다목적강당 건립 지원 보조금 전출(區 → 해운대교육지원청)

○ 2020. 5월 : 설계용역 착수

○ 2020.10월 : 설계용역 완료

○ 2020.12월 : 공사 착공

○ 2021. 8월 : 공사 준공

사업명

광안리일원 문화관광형 스마트타운 조성

담당자

스마트도시과 김정선(☎610-4882)

□ 사업목적

○ 광안리해변은 관광지로서의 다양한 인프라를 갖춘 강점을 지니나 주차,

교통의 문제를 지닌 약점과 해수욕장의 계절적 한계성에 따른 새로운 대안 필요

○ 스마트기술을 적용하여 도시에서 일어나는 문제를 해결하고, 관광콘텐츠를       강화하여 지역경쟁력을 확보하기 위해 광안리 일원 문화관광형 스마트타운을       조성하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 3월 ∼ 2021년12월

○ 위 치 : 부산광역시 수영구 민락동192-20번지 일원

○ 규 모 : 민락동192-20번지 일원 1,242㎢ 내 스마트타운 조성

○ 내 용

- 스마트시티 기반구축 : 스마트타운 플랫폼 구축, 유동인구 분석

- 관광콘텐츠 : 스마트미디어월, AR기반 모바일 서비스

- 관광편의 : 스마트주차정보, 스마트벤치, 스마트횡단보도

□ 투자심사 결과 : 적정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,246백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액
		기투자	2017	2018	2019	2020	2021
계	2,246	0	0	0	0	1,408	838
국 비	1,000	0	0	0	0	1,000	0
시 비	0	0	0	0	0	0	0
구 비	1,246	0	0	0	0	408	838
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진내역(사업완료)

○ 2020 스마트타운 챌린지 조성사업 본사업 선정               : 2020.2월

○ 광안리 일원 문화관광형 스마트타운 조성계획 수립           : 2020.2월

○ 광안리 일원 문화관광형 스마트타운 조성사업 PMO 용역 착수 : 2020.7월

○ 광안리 일원 문화관광형 스마트타운 조성사업 착수          : 2020.12월

○ 광안리 일원 문화관광형 스마트타운 조성사업 감리 용역 착수 : 2021.5월

○ 광안리 일원 문화관광형 스마트타운 조성사업 PMO 용역 완료 : 2021.8월

○ 광안리 일원 문화관광형 스마트타운 조성사업 용역 완료     : 2021.8월

○ 광안리 일원 문화관광형 스마트타운 조성사업 감리 용역 완료 : 2021.9월

○ 광안리 스마트타운 스마트주차서비스 용역 착수              : 2021.10월

○ 광안리 스마트타운 스마트주차서비스 용역 완료              : 2021.12월

사업명

2020 수영구 드론라이트쇼

담당자

스마트도시과 이은정(☎610-4884)

□ 사업목적

○ 장기간 지속된 코로나19로 지친 주민들에게 코로나블루 극복 계기 제공

○ 드론라이트쇼 공연을 통해 코로나19로 침체된 지역상권에 활력 부여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 12. 24. / 2020. 12. 31.

○ 위 치 : 광안리해변

○ 규 모 : 지상 드론 이착륙구역 100m2

지상 통제 구역(안전구역) 900m2

상공 공연 구간 지상 100m 상공, 5,000m2

1회 공연 시 군집드론 수 300대

□ 투자심사 결과 : 적정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 96.8백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액
		기투자	2017	2018	2019	2020	2021
계	96.8	0	0	0	0	70	26.8
국 비	0	0	0	0	0	0	0
시 비	0	0	0	0	0	0	0
구 비	96.8	0	0	0	0	70	26.8
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진내역(사업완료)

○ 용역계약 체결 완료 : 2020.11.27.

○ 용역계약 변경체결 완료 : 2021. 1.12.

○ 드론라이트쇼(Open Beta 공연) 1차 개최 : 2021. 2.12.

○ 드론라이트쇼(Open Beta 공연) 2차 개최 : 2021. 2.23.

○ 용역완료 : 2021. 3. 5.

□ 사업변경 내역

○ 변경 내역

기 간		금 액
당초	변경	당초	변경
2020.11.30.~ 2021.01.15.	2020.11.30.~ 2021.03.15.	96,800,000	변경없음

○ 변경사유 : 코로나19 재확산과 사회적 거리두기 2.5단계 시행에 따른 행사일정 연기

사업명

수영구 공공도서관 재건축사업

담당자

평생교육과 박채령(☎610-4015)

□ 사업목적 및 필요성

○ 이용자들의 정보 욕구 및 도서관 이용 수요 증가에 따른 맞춤형 도서관       시설 확충 필요에 따라, 기존 도서관을 재건립하여 주민의 수준 높은         지식문화 인프라를 구축하고 문화적 다양성이 공존하는 지역사회의 거점        도서관으로 만들고자 함

□ 사업개요 ☞ 투자심사내역

○ 기    간 : 2017년 3월 ∼ 2021년 하반기

○ 위    치 : 부산광역시 수영구 남천서로 33 외 2필지

○ 규    모 : 대지면적 6,604㎡, 연면적 4,100㎡ 이상, 지하1층/지상4층

□ 투자심사 결과 : 조건부 승인

○ 건립 후 유지관리 비용 최소화를 위해 제로 에너지 건축물 추진

○ 열람과 학습이 가능하도록 자료실 내 열람공간 등 시설 활용도를 높일 수       있도록 구성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,712백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2018	2019	2020	2021	2022 이후
계	19,712	4,803	89	663	3,185	5,398	5,574
국 비	5,388	0	64	662	2,212	2,173	277
시 비	4,041	0	2	1	347	838	2,853
구 비	10,283	4,803	23	0	626	2,387	2,444
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 95%)

○ 2016. 12. : 수영구도서관 재건립 기본계획 수립

○ 2017.  3. : 중앙 투자심사 조건부 승인, 공유재산관리계획 승인

○ 2018.  6. : 설계공모

○ 2018. 11. : 설계용역 착수

○ 2019. 12. : 설계용역 완료

○ 2020.  1. : 착공

○ 2021. 12. : 준공

□ 향후계획

○ 2022. 4. : 개관

□ 사업변경 내역

○ 수영구 도서관 재건립 기본계획 변경에 의거 총사업비 증액(2017.4.28.)

▷ 중앙 투자심사 결과 제로에너지 건축물 추진에 의한 사업비 증액

(당초) 15,928백만원 ⇒ (변경) 19,712백만원

○ 설계용역 완료에 따른 연면적 변경(2019.12.6.)

(당초) 연면적 4,100㎡ ⇒ (변경) 연면적 4,290㎡

사업명

호암골 노외공영주차장 건립

담당자

교통행정과 김명옥(☎610-4552)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주차환경이 열악한 고지대 주거 밀집지역의 불법 주차를 해소하고 안전하고 쾌적한 마을을 조성하기 위하여 호암골 공영주차장을 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2022년

○ 위 치 : 부산광역시 수영구 광안4동 1146번지 외 5필지

○ 규 모 : 대지면적 1,046.87㎡, 철골조 2개동 1층2단/2층3단, 54면

□ 투자심사 결과 : 적정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2018	2019	2020	2021	2022 이후
계	5,800	0	0	62	640	504	4,594
국 비	5,800	0	0	62	640	504	4,594
시 비
구 비
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0

※ 당초 총사업비 5,800백만원이었으나 사업규모 축소 등으로 실제 사업비 감소예정

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 85%)

○ '18. 11. : 공영주차장 건립계획 확정

○ '18. 12. : 2019년 주차환경개선지원(균특) 사업 확정

○ '19. 10. ~ '20. 10. : 실시설계용역

○ ’20. 12. : 공사 착공

○ '21. 12. : 현공정률 85%

▹ 공사기간 : ‘20. 12. 21. ~ ’22. 2. 7.

▹ 공사 현장 인근 민원제기 및 철골 자재 수급 파동 등으로 준공지연

□ 향후계획

○ ‘22. 상반기 : 주차장 준공 및 운영

□ 사업변경 내역

구 분	변경 전	변경 후
사업기간	2018~2020년	2018~2022년
위 치	광안4동 1146번지 외 7필지	광안4동 1146번지 외 5필지
대지면적	1,800㎡	1,046.87㎡
연 면 적	3,825㎡	982.35㎡
주 차 면	130면	54면
구 조	철골조 3층4단	철골조 2개동(1층2단/2층3단)

사업명

광안리어방축제

담당자

문화관광과 백승진(☎610-4062)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 유일 전통어촌마을의 민속문화를 주제로 지역 전통문화의 계승․보존․전파

○ 주민, 단체, 기업체의 참여확대를 통한 일자리 창출 및 지역민 대화합

○ 천혜의 관광자원 바다와 연계한 관광활성화 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 매년추진

○ 위 치 : 광안리해수욕장 일원

○ 규 모 : 6개 분야 33개 프로그램

□ 투자심사 결과 : 조건부 승인

○ 이전 사례 성과분석을 통한 구체적 행사계획을 수립

○ 민자(후원 등) 유치 등 재원 다각화 검토

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2203.2백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2018	2019	2020	2021	2022 이후
계	2,203.2	0	550	600	217.6	60.6	775
국 비	249.1		80	0	108.8	30.3	30
시 비	205		65	95	0	0	45
구 비	1,749.1		405	505	108.8	30.3	700
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

※ 특별교부세, 특별교부금은 구비로 포함

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 100%)

○ 축제홍보 및 경쟁력강화 사업 추진(2021. 9.~ 2021. 12.)

구분	사 업 명	주요내용
홍보	경상좌수사 행렬전시 한지 등(燈) 포토존 설치 운영	- 한지 등 모형 30점(수영야류, 어방놀이, 취라적 등) 행렬의 역사적 의미를 담은 안내판 제작
경쟁력 강화	축제물품 구비 등	- 어방민속마을 부스별 소품 및 운영물품 제작(총24점) 나룻배, 우물터, 장승, 솟대, 마루 등

□ 향후계획

○ 위드코로나 시대 대응 가능한 축제 프로그램 운영

○ 광안리어방축제만의 차별화된 콘텐츠로 축제 경쟁력 강화

□ 사업변경 내역

○ 코로나19로 축제 취소되어 축제 홍보 및 경쟁력강화 사업 시행

- 2021년 광안리어방축제 국고보조금 집행계획 변경 승인

[부산시 관광진흥과-2276(2021. 8. 30.)]

사업명

수영경찰서 진입도로 개설공사

담당자

건설과 박상준(☎610-4712)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신축하는 수영경찰서의 교통 수요 증가를 고려 원활한 진·출입을 위하여 수미로와 연결하는 진입로를 확장하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년

○ 위 치 : 부산광역시 수영구 수영동 352-8번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=45m, B=12m

□ 투자심사 결과 : 적정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2018	2019	2020	2021	2022 이후
계	2,000					75	1,925
국 비	0
시 비	0
구 비	2,000					75	1,925
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

※ 특별교부세, 특별교부금은 구비로 포함

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 5%)

○ ’20.06 : 도시관리계획(공공청사,도러)결정 및 지형도면고시

○ ’21.03 : 실시설계용역 착수

○ ’21.06 : 실시설계용역 준공, 실시계획 고시

○ ’21.09 : 감정평가법인 선정 및 평가의뢰

○ ’21.10 : 손실보상금 산정 및 협의

□ 향후계획

○ ’22. 5 : 수용재결에 따른 토지보상 완료

○ ’22. 6 : 공사착공

○ ’22. 9 : 공사준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

광안3동 복합동사 건립

담당자

행정지원과 김현희(☎610-4112)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1981년 신축 후 40년이 경과한 노후□협소한 동사의 확충□개선을 통해 생애주기별 평생학습 프로그램과 이용자의 일상적 요구에 밀착된 복합 행정서비스 제공기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 9월 ~ 2022년 12월

○ 위 치 : 부산광역시 수영구 광안동 1069-11

○ 규 모 : 대지면적 403.4㎡, 연면적 998.22㎡, 지하1층/지상4층

□ 투자심사 결과 : 적정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,390백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2018	2019	2020	2021	2022 이후
계	4,390	0	0	390	136	42	3,822
국 비	0
시 비	0
구 비	4,390			390	136	42	3,822
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

※ 특별교부세, 특별교부금은 구비로 포함

□ 추진상황(공정율 20%)

○ 2019.    9월 : 광안3동 복합동사 건립 기본계획 수립

○ 2019.   11월 : 건립 부지 회계이관 및 취득, 중기재정계획 반영

○ 2020.    4월 : 부산시 지방재정투자사업 심사 ☞ 적정

공공건축 사업계획 사전 검토(공공건축지원센터)

○ 2020.    5월 : 공공건축심의(수영구 건축위원회)

○ 2020.    8월 : 기본 및 실시설계용역 계약심사(부산시 청렴감사담당관)

○ 2020. 9~11월 : 건축설계공모(일반 설계공모) 진행

☞ 4개 작품 응모, 1개 작품 선정(당선작 제출 업체에 설계권 부여)

○ 2021. 1~12월 : 기본 및 실시설계용역

□ 향후계획

○ 2021.   12월 : 공종별 공사 및 감리용역 발주 및 입찰

○ 2022.    1월 : 공종별 공사 및 감리용역 계약

○ 2022. 2~12월 : 공사 실시 및 준공, 신 동사 이전 개소

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

수영구 복지 하나로센터

담당자

재무과 윤기영(☎610-4152)

□ 사업목적 및 필요성

○ 구청사 과밀화로 인한 공간 부족 일부 해소 및 증가하는 복지수요 대비

○ 복지업무 원스톱서비스 제공 및 지역 불균형 해소를 위한 드림스타트센터 추가 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2025년(4년)

○ 위 치 : 수영구 광안동 735-4번지

○ 규 모 : 대지 915.5㎡, 연면적 4,104.04㎡(부지매입 27.75억원, 2021년 6월)

□ 투자심사 결과 : 조건부 승인

○ 중기(지방)재정계획 반영(수정) 및 예산편성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,603백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2018	2019	2020	2021	2022 이후
계	11,603	0	0	0	0	2,775	8,828
국 비	0
시 비	0
구 비	11,603					2,775	8,828
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

※ 특별교부세, 특별교부금은 구비로 포함

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 18%)

○ 2020.04. 구청사별관 복지하나로센터(가칭) 건립 기본계획 수립

○ 2020.04. 광안동 735-4번지 부지매입 협조 요청 ☞ 市

○ 2020.04. 공유재산심의(區)

○ 2020.10. 지방재정투자사업 심사(市)

○ 2020.12. 2021년 공유재산관리계획 승인(區)

○ 2021.01. 공유재산 매수신청 ☞ 市

○ 2021.04. 市 공유재산관리계획 승인(광안동735-4 매각)

○ 2021.05. 공유재산 매매계약체결안내문 접수

(한국자산관리공사 부산지역본부-81960)

○ 2021.06. 부지 매입 ▷ 2,775백만원

○ 2021.10. 복지하나로센터(가칭) 수영구청 별관 건립계획 수립 ☞ 재무과

○ 2021.10. 복지시설 확충을 위하여 토지(광안동 735-5)추가매입검토

▷ 비효율성으로 용적률 확충(인센티브 적용)방안으로 전환 추진

○ 2021.11. 중기(지방)재정계획 반영(수정) 및 예산편성

□ 향후계획

○ 건축사업계획 사전검토(22.1월 ~ 2월) → 설계공모(22.3월 ~ 6월) → 건축심의(22.7월 ~ 9월) → 용역계약심사(22.10월) → 기본ㆍ실시설계 등(22.11월 ~ 23.10월) → 공사발주ㆍ준공(23.11월 ~ 25.4월)

사업명

호암초등학교 다목적강당 건립 지원

담당자

평생교육과 제지영(☎610-3932)

□ 사업목적 및 필요성

○ 학생들의 다양한 학습활동 지원과 지역 주민 문화·체육활동 공간 조성

○ 개방형 다목적강당 건립으로 지역주민들의 생활체육 활성화와 건강           증진에 기여, 문화센터로서의 역할 수행

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2021년 ~ 2022년

○ 사업위치 : 부산광역시 수영구 호암로 57(광안동, 호암초등학교)

○ 사업규모 : 지상3층(기존 2층 → 1개층 증축), 연면적 777㎡

○ 사 업 비 : 2,365백만원

□ 투자심사 결과 : 조건부 승인

○ 2021~2025 중기지방재정계획 반영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,365백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2018	2019	2020	2021	2022 이후
계	2,365	0	0	0	0	0	2,365
국 비	0
시 비	118						118
구 비	118						118
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	2,129						2,129 교육부특교금

※ 특별교부세, 특별교부금은 구비로 포함

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 50%)

○ 2020.  6월 : 학교 다목적강당 건립 지원계획 알림(부산시)

○ 2020.  6월 : 다목적강당 건립 신청(학교 → 해운대교육지원청)

○ 2020.  6월 : 구비 지원여부 검토 요청(해운대교육지원청 → 구)

○ 2020.  6월 : 구비 지원가능 검토 회신(구 → 해운대교육지원청)

○ 2020.  6월 : 다목적강당 건립 신청(해운대교육지원청 → 시교육청 → 부산시)

○ 2020.  9월 : 수영구 교육경비보조금심의위원회 심의

○ 2020. 11월 : 부산시 지원대상 학교 선정·통보

○ 2021.  2월 : 다목적강당 건립 보조금 전출(구 → 해운대교육지원청)

○ 2021.  4월 : 설계용역 발주

○ 2021.  9월 : 설계용역 완료

○ 2021. 12월 : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2022. 6월 : 공사 준공

사업명

수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립

담당자

행정지원과 김현리(☎610-4795)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수영구 스포츠문화타운이 2019년 7월부터 개관하여 운영 중이나, 기존        지하주차장이 협소하여 대기차량이 발생하고 불법 주·정차로 인한 교통       장애가 유발되어, 부설주차장 추가 건립을 통해 이용자 및 인근 거주

주민의 불편과 안전사고 발생 우려를 해소하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 9월 ~ 2022년 8월

○ 위 치 : 부산광역시 수영구 수영로521번길 77 (광안동 1333)

○ 규 모 : 대지 966.67㎡, 건물 연면적 2,850㎡ (3층 4단 철골조, 95면)

□ 투자심사 결과 : 적정

○ 2020년 수시 재정투자사업 심사 원안 승인(적정)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,842백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2018	2019	2020	2021	2022 이후
계	3,842	0	0	0	0	63	3,779
국 비	0	0	0	0	0	0	0
시 비	0	0	0	0	0	0	0
구 비	3,842	0	0	0	0	63	3,779
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0

※ 특별교부세, 특별교부금은 구비로 포함

□ 추진상황(추진단계 및 공정률 1.6%)

○ 2019. 11. 2020 ~ 2024년 수영구 중기지방재정계획 반영

○ 2020. 9. 수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립 기본계획 수립

○ 2020. 10. 2020년 제5차 수영구 공유재산심의회 원안 가결

○ 2020. 11. 2020년 수시 재정투자사업 심사 원안 승인

○ 2020. 12. 2021년도 정기분 부산광역시 수영구 공유재산 관리계획안 원안 가결

○ 2021. 4. 부산시 공공건축 사업계획 사전검토 결과 통보

○ 2021. 5. 수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립 사업계획 변경(건축과)

○ 2021. 7. 공공건축심의(區 건축위원회)

○ 2021. 7. 계약심사(부산시) 이행 ▹ 심사금액 145,684천원

○ 2021. 8. 건축 설계 공모 진행

○ 2021. 10. 설계공모 당선작 선정

○ 2021. 11. 기본·실시 설계용역 계약 및 착수

□ 향후계획

○ 22. 3. ~ 22. 8. 공사발주 및 계약, 착공, 준공

사업명

민락매립지 공영주차장 입체화 조성사업

담당자

교통행정과 김명옥(☎610-4552)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시형 생활주택 등 주차장 설치기준이 완화된 소규모 주거시설 난개발에 따른 관광지 일원 주차난 해소 및 악화된 주거 질 개선을 위한 민락매립지 공영주차장 입체화 조성사업 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년~2023년

○ 위 치 : 부산광역시 수영구 민락동 113-46, 113-50번지

○ 규 모 : 부지 6,393㎡, 철골조 2층 3단 (주차면수300면)

□ 투자심사 결과 : 조건부 승인

< 조건부 내용 >

· 국비(균특회계) 확보 후 추진

· 인근 공영주차장 가동률, 회전율 및 인근지역 불법 주차율 등

주차실태를 파악하여 적정 주차 면수 고려

· 공사 기간 내 교통대책, 안전관리대책 방안 마련 필요

· 인근 주거지 민원(조망권, 소음, 교통난 등) 우려, 사업추진 전

주민설명회 및 공청회를 통한 의견 수렴 필요

· 중기지방재정계획 반영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원                                   (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2018	2019	2020	2021	2022 이후
계	8,000	0	0	0	0	0	8,000
국 비	4,000	0	0	0	0	0	4,000
시 비	1,600	0	0	0	0	0	1,600
구 비	2,400	0	0	0	0	0	2,400
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진상황

○ ’21.  7 : 추진계획 수립

○ ’21. 10 : 지방재정 투자 심사

○ ’21. 10 : 중기지방재정계획 반영, 공유재산관리계획 변경

□ 향후계획

○ ’22. 1. ~  22. 12. : 기본 및 실시설계용역 추진

○ ’23. 1. ~  23. 12. : 공사추진

○ ’24. 3. : 주차장 운영

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

망미중학교 다목적강당 건립 지원

담당자

평생교육과 제지영(☎610-3932)

□ 사업목적 및 필요성

○ 학생들의 다양한 학습활동 지원과 지역 주민 문화·체육활동 공간 조성

○ 개방형 다목적강당 건립으로 지역주민들의 생활체육 활성화와 건강증진에 기여, 문화센터로서의 역할 수행

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2023년

○ 사업위치 : 부산광역시 수영구 망미배산로 102

○ 사업규모 : 지상2층(지상1층 주차장(피로티), 지상2층 다목적강당), 연면적 1,040㎡

○ 사 업 비 : 5,005백만원

□ 투자심사 결과 : 조건부 승인

○ 2022~2026 중기지방재정계획 반영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,005백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2018	2019	2020	2021	2022 이후
계	5,005	0	0	0	0	0	5,005
국 비	0
시 비	251						251
구 비	251						251
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	4,503						4,503 교육부특교금

※ 특별교부세, 특별교부금은 구비로 포함

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 0%)

○ 2021. 4월 : 학교 다목적강당 건립지원계획 통보 (부산시 → 구, 교육청)

○ 2021. 5월 : 학교 다목적강당 건립 지원 신청 (망미중학교 → 해운대교육지원청)

○ 2021. 5월 : 구비 지원여부 검토요청 (해운대교육지원청 → 구)

○ 2021. 5월 : 구비 지원가능 회신 (구 → 해운대교육지원청)

○ 2021. 6월 : 학교 다목적강당 건립지원 신청 (해운대교육지원청→부산시)

○ 2021. 9월 : 수영구 교육경비보조금심의위원회 심의

○ 2021.11월 : 부산시 지원대상 학교 선정·통보

□ 향후계획

○ 2022.  2월 : 다목적강당 건립 보조금 전출(구 → 해운대교육지원청)

○ 2022.  5월 : 설계용역 발주

○ 2022. 12월 : 설계용역 완료

○ 2023.  1월 : 공사 착공

○ 2023. 12월 : 공사 준공

사업명

라이프스타일 축제

담당자

문화관광과 이우철(☎610-4064)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존에 진행되어오던 지역 축제를 다양한 시민참여를 기반으로 만들어

가는 축제로 개선

○ 지역의 다양한 문화공간, 단체, 골목 등의 자원을 바탕으로 새로운 욕구를       수용할 수 있는 소규모 축제의 발굴, 개발, 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1월 ~ 12월

○ 위 치 : 수영구 전역

○ 규 모

- 축제 개선․발굴 위원회 구성 및 운영(위원회 개최 8회)

- 축제 개선ㆍ발굴을 위한 컨설팅(2회) 및 포럼(2회) 개최

- 시민참여형 축제 1회, 골목 축제 3회 개최 계획 수립

- 각 축제 추진 단체 공모

- 시민참여형 축제 1회, 골목 축제 3회 개최

□ 투자심사 결과 : 적정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 126백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2018	2019	2020	2021	2022 이후
계	126	0	0	0	0	0	126
국 비	0
시 비	0
구 비	126						126
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 0%)

○ 세부 추진계획 수립 예정(문화도시지원센터)

□ 향후계획

○ 세부 추진 계획 수립

○ 축제 개선 및 발굴 위원회 구성 및 회의 개최

○ 컨설팅 및 포럼 개최

○ 시민참여형 축제1회, 골목 축제 3회 개최 계획 수립

○ 축제 기획 및 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

도시라이프스타일살롱

담당자

문화관광과 이우철(☎610-4064)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 주민들의 다양한 취향과 욕구를 발굴하고 지원

○ 자발적인 커뮤니티 활동을 통해 문화정책 및 사업에 적극적으로 참여하는       시민 그룹 형성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1월 ~ 12월

○ 위 치 : 수영구 전역

○ 규 모

- 3인 이상의 주민운영 모임 모집 및 선정 : 30개 모임

- 모임별 활동 추진 및 아카이빙 진행

- 워크숍 1회, 종합보고회 1회 개최 및 활동기록 플랫폼 구축

□ 투자심사 결과 : 적정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2018	2019	2020	2021	2022 이후
계	100	0	0	0	0	0	100
국 비	0
시 비	0
구 비	100						100
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

※ 특별교부세, 특별교부금은 구비로 포함

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 0%)

○ 세부추진계획 수립 예정(문화도시지원센터)

□ 향후계획

○ 세부사업계획 수립

○ 사업추진 주관 단체 공모

○ 3인 이상의 주민운영 모임 공개모집 및 선정

○ 모임별 활동 진행 및 아카이빙 진행

○ 활동기록 홈페이지 개설 및 활동기간 내 지속 업로드 추진

○ 참여팀 워크숍 1회, 종합보고회 1회 개최

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

C-side 프로젝트

담당자

문화관광과 이우철(☎610-4064)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시 속에서 공동체를 만들어가기 위한 노력, 사회적 문제를 해결하기        위한 다양한 실험을 통해 공공이 다 해결하지 못하는 문제를 발굴하고        해결해나가는 과정과 경험 축적

○ 계층, 생태, 세대, 다양성 등 복합적 사회문제 대응을 위한 지역 차원의       노력을 담보하고 주체 발굴

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1월 ~ 12월

○ 위 치 : 수영구 전역

○ 규 모

- 프로젝트 사업설계를 위한 워크숍 1회, 사업추진을 컨설팅 3회 개최

- 프로젝트 참여팀 30팀 공개모집 및 팀별 사업 추진

- 성과보고대회 개최 1회

□ 투자심사 결과 : 적정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 140백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2018	2019	2020	2021	2022 이후
계	140	0	0	0	0	0	140
국 비	0
시 비	0
구 비	140						140
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

※ 특별교부세, 특별교부금은 구비로 포함

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 0%)

○ 세부추진계획 수립 예정(문화도시지원센터)

□ 향후계획

○ 프로젝트 사업설계를 위한 워크숍 개최 1회, 컨설팅 개최 3회

○ 세부 사업 추진 계획 수립

○ 주관단체 선정 및 참여팀 공개모집

○ 팀별 사업 추진 및 아카이빙 진행

○ 최종결과물 공유를 위한 성과공유대회 개최 1회

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

광안리4지구 연안정비사업

담당자

건설과 박상준(☎610-4712)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해수면 상승, 고파랑 증가 등 기후변화로 인하여 연안침식 지속·심화에 따른 재해로부터 안전한 연안 공간 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 1월 ~ 2025년 12월

○ 위 치 : 광안리 해수욕장

○ 규 모 : 양빈 50,000㎥

□ 투자심사 결과 : 조건부 승인

○ 2022~2026년 중기지방재정 계획 반영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,440백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2022	2023	2024	2025	2026 이후
계	4,440	0	310	1,376	1,377	1,377	0
국 비	3,108		217	963	964	964
시 비	666		46.5	206.5	206.5	206.5
구 비	666		46.5	206.5	206.5	206.5
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

※ 특별교부세, 특별교부금은 구비로 포함

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 0%)

○ ’20.06 : 제3차 연안정비기본계획 반영

○ ’21.11 : 區 투자심사 심의

□ 향후계획

○ ’22. 1월 ~ 12월 : 양빈사업 기본 및 실시설계 용역

○ ’23. 1월 ~ ’25. 12월 : 양빈사업 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음